문서번호	도시철도설비부-58
결재일자	2014.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
이재영		김형기	01/03 정찬웅
협 조	시설전기과장			박성우
	주무관			안종필
	주무관			고명규
	주무관			정해철
	주무관			황영필

『지하철 9호선연장건설(2단계) 송변전공사』 설계변경 심의위원회 개최

2014. 01

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『지하철 9호선연장건설(2단계) 송변전공사』

설계변경 심의위원회 개최

지하철 9호선 연장건설(2단계) 송변전공사 설계변경 사항에 대하여 아래와 같이 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과에 따라 계약금액을 조정 코자함.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 서울지하철 9호선연장(2단계) 송변전공사

공사규모

- 수전선로 : 1.14km(한전 선능S/S~지하철 929정거장S/S)

- 변전소 1개소, 연락송배전 L=4.5km

공사기한 : ‘12.12.27~’14. 9.11(1차 ‘14. 1. 14)

계약금액 : 3,314,724천원(1차 2,607,000천원, 2차 707,724천원)

계약업체 : 세세건설(주)  대표  윤 현 규

Ⅱ		설계변경 내용

설계변경 주요내용

구 분	설계변경 주요내용	비고
수 전	○수전선로 루트변경 굴착구간 증․감(도로굴착➩본선터널) ○한전전력구 행거/크리트 및 본선 트라프 물량 변동 ○수전케이블(400㎟) 드럼당 : 300→150m변경 접속제 증가	안전시공
변 전	○전식방지용 접지선 및 단자함 추가설치 ○변전소 조명설비 지지용 전산볼트 추가(설계 미반영) ○DC절연 에폭시 증․감(장비규격 변경 등)
연락송배전	○정거장 전기실 장비배치 변경으로 케이블 물량 증가 ○변전실~정거장 Main1,2,3호계 케이블 추가(설계 미반영) ○루트변경 및 타 공정과 간섭구간 핸드홀 물량 증가 ○Tie-Post 및 장래구간(3단계) 횡단트라프 물량 증․감

단가산정

구 분		산정방법	비고
기존비목	증	계약단가 적용	공사계약일반조건 제20조 1항
	감	계약단가 적용	“
신규비목	증	조사단가 × 낙찰율	공사계약일반조건 제20조 2항

도급비 변경내용

구 분	당 초(천원)	변 경(천원)	증 감(천원)	비 고
수전선로공사	330,956	317,005	-13,951
연락송배전공사	1,856,756	1,914,711	57,955
변전설비공사	340,145	360,613	20,468
소 계	2,527,857	2,592,329	64,472
제 경비	786,867	803,692	16,825
합 계	3,314,724	3,396,021	81,297

Ⅲ		설계변경심의 위원회 개최

일   시 : 2014.  1.  7(화)  15:00

장   소 : 도시철도설비부 회의실

심의내용 : 지하철9호선연장건설(2단계) 송변전공사 설계변경 사항 적정성 여부 심사

Ⅳ		설계변경심의 위원회 구성

구 분	소 속 및 직 위	성 명	비 고
위 원 장	도시철도설비부 시설전기과장	박 성 우
간 사	도시철도설비부 송변전과	이 재 영
심의위원	도시철도설비부 송변전과	고 명 규
	도시철도설비부 시설전기과	황 영 필
	도시철도설비부 신 호 과	안 종 필
	도시철도설비부 차 량 과	정 해 철

Ⅴ		기타 행정사항

설계변경 사항에 대하여 심의위원회 심의의견에 따라 조치결과를 반영하여 설계변경 시행코자 합니다.

따로붙임 : 감리단 설계변경 검토의견서 및 변경내역 1부.  끝.