서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	정비사업 시기조정 심의결과 통보

1. 강남구 주택과-27548(2015.7.15.)호 및 31707(2015.8.19.)호, 강동구 주택재건축과-22816(2015.8.12.)호와 관련입니다.

2. “도시 및 주거환경정비조례” 제58조에 따라 귀 구에서 신청한 ‘정비사업 시기조정 심의’건에 대해 주택정책심의위원회에서 심의하고 그 결과를 다음과 같이 통보하오니 사업추진에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

심의요청기관	심의 안건	심의 결과
강남구 (주택과)	개포주공3단지아파트 정비사업 관리처분인가 시기조정	시기조정 대상이 아님
	개포시영아파트 정비사업 관리처분인가 시기조정	4개월 시기조정 -이주시기가 특정시기에 집중되지 않도록 분산된 이주계획 수립권고
	개포주공4단지아파트 정비사업 사업시행인가 시기조정	시기조정 대상이 아님 단, 관리처분인가시 시기조정 검토가능
강동구 (주택재건축과)	고덕주공3단지아파트 정비사업 관리처분인가 시기조정	2개월 시기조정 -이주시기가 특정시기에 집중되지 않도록 분산된 이주계획 수립권고

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강남구청장(주택과장),강동구청장(주택재건축과장)
주무관	박은영		주택정책팀장	송광남		주택정책과장	09/11 최경주
협조자
시행	주택정책과-15043	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 3층	/
전화	02-2133-6752	/전송	02-774-2122	/	compey3@seoul.go.kr	/	대시민공개