투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	2015년도 서울시민 가족자연체험시설 조성공사(철원) 변경계약 의뢰(공사기간)

1. 우리본부에서 시행중인『2015년도 서울시민 가족자연체험시설 조성공사(철원)』에 대한 변경계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 2015년도 서울시민 가족자연체험시설 조성공사(철원)

나. 계 약 자 : 흥일건설주식회사

다. 계약금액 :211,397,000원

라. 계약기간 : 2015.7.23. ~ 2015.9.20.

마. 변경계약 요청 내용 : 공사기간

구분	공사기간	비고
변경전	2015. 7. 23. ~ 2015. 9. 20.
변경후	2015. 7. 23. ~ 2015. 10. 11.	21일 연장

바. 변경사유 : 민통선 통제 등에 따른 추가 공사기간 필요

붙임 : 1. 공사기간 변경 방침 1부.

2. 수정공정표 1부.

3. 준공기한연기의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	김희태		건축관리과장	곽동호		건축부장	09/16 안재혁
협조자	경리과장	代정해민
시행	건축부-10579	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)