문서번호	교통운영과-19011
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	중앙차로팀장	교통운영과장		보행친화기획관
이민호	이병운	강진동		10/02 김용남
협 조

천호대로 연장 중앙버스전용차로

기본(보완) 및 실시설계 용역 시행 보고

2015. 10

도시교통본부

(교통운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

천호대로 연장 중앙버스전용차로

기본(보완) 및 실시설계 용역 시행 보고

천호대로(광나루역) 도로확장 사업과 연계하여 천호대로 중앙버스전용차로 단절구간에 중앙버스전용차로를 설치하여 대중교통 이용 편의를 제공하고자 설계 용역을 시행코자 함

1		용역 개요

○ 용 역 명 : 천호대로 연장 중앙버스전용차로 기본(보완) 및 실시설계 용역

○ 구    간 : 광진구 아차산역 ~ 강동구 천호역

○ 규    모

- 중앙버스전용차로 3.3km, 중앙정류소 6개소

○ 용 역 비 : 100백만원

○ 용역기간 : 2015.10월 ~ 2016.9월

천호대로 연장

(3.3km)

기 운영 구간

(천호·하정로)

기 운영 구간

(천호~하남BRT)

도로확장

(900m)

【 위 치 도 】

2		추진 경위

○ ’07.11   : 천호대로 확장 타당성 조사 및 기본계획 완료

○ ’09.02   : 천호대로(광나루역)확장사업 추진 계획 수립

○ ’10.05   : 천호대로 도로 확장공사 착수

○ ’10.12   : 천호대로 연장 중앙버스전용차로 기본 및 실시설계 용역 착수

- 도로확장공사가 지연(문화재 발굴 등)됨에 따라 기본설계만 추진하고, 실시설계는 추후 도로확장 완공시기와 연계할 수 있도록 별도 시행

○ ’15.09  : 도로확장공사 공사기간 연장(2015.12→2017.12)

3		용역 필요성

○ 현재 추진 중인 천호대로(광나루역) 도로확장공사가 2017.12월에 완료될 예정으로 도로확장공사와 연계하여 중앙버스전용차로 설치사업 추진시기 도래

○ 천호대로 중앙버스전용차로 단절구간에 중앙버스전용차로를 설치함으로써 천호·하정로 중앙버스전용차로와 천호~하남간 BRT(중앙차로)를 연계하여 서울 동남축 대중교통 네트워크를 구축하여 대중교통 이용 효율 증대

4		용역 시행 계획

○ 기본설계 보완 및 실시설계 용역 시행

- 천호대로 연장구간은 기본설계를 기 시행(’10.12~’12.2)하였으나, 그 후 지역 및 교통여건 변화를 반영하여 기본설계 보완 시행

※ 중앙버스전용차로 공사는 현재 시행 중인 도로확장공사(도시기반시설본부)에 포함하여 추진(’17.12월 완료 예정, 공정률 57.9%)

○ 과업 주요내용

- 교통현황조사 및 분석(시설, 운영, 교통소통, 대중교통 등)

- 교차로(천호지하차도 포함) 버스노선 계획 및 교통처리 방안 등

- 용량분석(정류소, 버스차로, 일반차로) 및 중앙정류소 배치 계획

- 유턴금지에 따른 우회처리 방안

- 중앙버스전용차로 시행 전·후 효과 분석

- 공사 중 교통처리계획 등

○ 소요예산 확보(교통사업특별회계)

- 용 역 비 : 100백만원(’15년도 도로확장공사 예산 활용)

- 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 버스서비스 이용제고, 천호대로 중앙버스전용차로 확충 및 도로확장, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

5		향후 추진 계획

○ ’15.10         : 기술용역 타당성 심사

○ ’15.10         : 용역 착수

○ ’15.10~’16.9  : 용역 시행.  끝.