문서번호	토목부-20876
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	10/06 노우성
협조
	주무관		강철규

교통안전시설(PE방호벽) 설치 검토보고

(서울역 주변 교차로 개선공사)

2015. 10.

도시기반시설본부

(토목부)

교통안전시설(PE방호벽) 설치 검토보고

(서울역 주변 교차로 개선공사)

남대문경찰서 요청에 따라 보행자의 안전통로 확보와 차량의 안전운행을 위한 교통안전시설(PE방호벽) 설치 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 남대문경찰서 교통과-5857(2015. 9.25.)교통개선공사 추가설치 지시

○ 유호(서울역)제15-10(2015.10. 2.)실정보고(공사용 휀스설치 변경)

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 서울역 주변 5개소 교차로

○ 규    모 : 교차로 개선 4개소, 삼거리 신설 1개소

- 서울역교차로, 중림동교차로, 염천교교차로, 숙대입구교차로, 숭례문삼거리(신설)

○ 공사기간 : 2015. 8. 7.∼ 2015.12.31.

○ 도 급 비 : 1,034백만원

○ 시 공 사 : 유호산업개발㈜

Ⅲ		보고내용

□ 교통안전시설(PE방호벽) 설치

➀ 보고사유

- 남대문경찰서 요청에 따라 보행자 안전통로 확보와 차량의 안전운행에 만전을 기하고자 교통안전시설(PE방호벽)을 설치하고자 함.

·설치방법 ┏ 보도측 : 가림막 휀스

┗ 차도측 : PE방호벽

·설치장소 ┏ 염천교 교차로 : 가림막휀스(104m), PE방호벽(126m)

┗ 중림동 교차로 : 가림막휀스(107m), PE방호벽(112m)

➁ 위치도

염천교 교차로	중림동 교차로

➂ 수량 증감내역

공 종	규 격	단 위	당 초	변 경	증·감	비 고
1.부대공
가림막휀스		m	216	211	-5
PE방호벽	1200*600*900	m	-	238	238

➃ 공사비 증감내역                               (단위 : 원)

구 분	공 사 비			비고
	당 초	변 경	증·감
1.가림막휀스	796,392	777,957	-18,435
2.PE방호벽	-	11,050,816	11,050,816
직접공사비	796,392	11,828,773	11,032,381
간접공사비	183,608	2,491,227	2,307,619
공급가액	980,000	14,320,000	13,340,000
부가가치세	98,000	1,432,000	1,334,000
계	1,078,000	15,752,000	14,674,000

※ 단가적용 : 낙찰율 86.89% 적용

Ⅳ		조치계획

○ 본 공사의 원활한 추진을 위해 교통안전시설(PE휀스) 설치를 승인하고향후 설계변경시 반영 조치하고자 함.

붙  임 : 시공사 실정보고 1부.  끝.