문서번호	설비부-12302
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	10/06 박기형

『남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사』 실정보고 사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

도시기반시설본부

[설 비 부]

남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사

실정보고 사항 검토보고

남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사와 관련하여 유지관리부서의 요구사항 등 감리원 실정보고 승인요청이 있어 검토하고 보고 드림

Ⅰ				공 사 개 요

◦ 공 사 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사

◦ 도 급 액 : 620,082,440원

◦ 공사기간 : 2010.11.29 ～ 2015.12.30.

◦ 도 급 자 : ㈜삼구전력 외 1개사

◦ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

Ⅱ				관 련 근 거

◦ 천호수 제2015-476호(2015.10.06.)

- 실정보고(도로유지관리 기관 요구사항 및 한전불입금 조정 반영) 승인요청

Ⅲ				실 정 보 고

◦ 실정보고 내용 검토

공 종	현황 및 문제점	감리 검토의견	비 고
1. 가로등주	▷ 가로등(LP-2)분전반 간격배열유지 및 관리기관 구분에 따른 가로등 재배치.	▶ 가로등 간격 배열유지 및 유지관리기관 구분에 따른 가로등 가로등 재 조정으로 2본 삭제
2. 가로등기구	▷ LED 150W로 검토 선정하였으나 조도 시물레이션 결과 도로 등급인 M2의 평균노면휘도 1.5cd/㎡를 만족하지 못하므로 재 선정 필요.	▶ 도로조명등급 M2에 따라 평균 노면휘도 1.5(cd/㎡)를 만족하기 위해 광원을 LED180W로 선정 (조도시물레이션 첨부)
3. 분전함 및 불법광고물 부착방지시설	▷ 유지관리부서의 요청으로 분전반 양방향 감시시스템을 반영 설치함으로써 도급공사비에 대하여 추가공사비 발생 ▷ 강서구 요청사항인 불법광고물 부착방지시설(감전보호기능포함)을 도급분에 반영됨	▶ 원가절감을 위하여 관급으로 변경. ▶ 예산절감을 위하여 관급으로 변경하여 설치
4. 교통신호기	▷ 오정대로(고강지하차도)구간 부천시에서 교통신호등 LED로 선 시공	▶ 예산절감을 위하여 오정대로사거리 교통신호등 재이용
5.한전불입금	▷ 가로등 분전함 4면에 대하여 한전인입비용 변경(2010년도 단가 변경 및 시운전 전기요금 발생	▶ 가로등 분전함 표준시설분담금은 2015년단가에 변경반영하고 3개월분의 전기요금 이전비에 반영

Ⅳ				감 리 원 의 견

◦ 서울시 야간경관 가이드라인 기준에 따라 조명등급을 상향하여 LED등기구는 180W로 적용하여 노면휘도를 만족하고 사용 자재를 사급에서 관급자재로 전환하여 공사비 절감하는 것이 적정함.

Ⅴ				보 고 자 의 견

◦ 실정보고에 대한 검토 결과 도로 설계기준 M2의 휘도(1.5cd/㎡)를 만족할 수 있는 LED 150W로 수정하고, 도급에 반영하기로 한 가로등 양방향 제어기, 불법광고물부착방지물 등은 관급자재로 변경하여 예산을 절감하기위하여 감리원 검토의견이 타당하여 실정 보고건에 대하여 승인하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

따로붙임: 1. 감리원 실정 보고서  1부.

2. 시공사 실정보고서 1부.  끝.