투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	SH공사사장(택지사업본부 마곡사업처장)
(경유)
제목	방화대로 보도 및 차도 정비 촉구

1. 귀 공사의 발전을 기원합니다.

2. 귀 공사에서 우리사업소 관내 시행하는 마곡구역 도시개발 사업 단지 조성 공사와 관련 우리사업소에서 재포장 예정인 방화대로의 보도 및 차도 정비 공사가  지연 되고 있고 장기간 미정비된 도로상태로 많은 민원이 발생되고 있는바,

3. 이와관련 우리사업소에서 발주한 노후포장도로정비공사의 방화대로의 재포장도 지연되고 있는 실정으로 마곡구역내 방화대로 보도 및 차도의 정비를 유선으로 수차례 촉구한 바 있으나 현재까자 정비가 되지 않은 상태로서  2015.10.21.까지 정비를 완료하여 주시기 바라며

4. 기한내에 미정비시에는 현재 우리사업소에서는 재포장이 불가능한 실정으로 귀공사에서 사업구간에 접한 차도를 전폭 재포장하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	이승행		도로보수과장	10/13 김권일
협조자
시행	도로보수과-9850	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237 강서도로사업소 도로보수과	/
전화	2657-7972	/전송	2657-7910	/	2ss2hh@seoul.go.kr	/	대시민공개