문서번호	설비부-12817
결재일자	2015.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 10/16 박기형
협조

『한양도성 인왕지구 외 1개소 경관조명 설치공사』

실정보고(모노레일 설치 건) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『한양도성 인왕지구 외 1개소 경관조명 설치공사』

실정보고(모노레일 설치 건) 검토보고

『한양도성 인왕지구 외 1개소 경관조명 설치공사』의 인왕지구 현장의 공사자재 반입을 위한 모노레일 설치 건의 감리보고가 있어 검토 보고 드림.

공사개요

□ 건    명 : 한양도성 인왕지구 외 1개소 경관조명 설치공사

□ 계 약 자 : 성제전기(주)

□ 계약기간 : 2015. 9. 7 ～ 2015. 12. 31

□ 계약금액 : 533,953,520원

관련근거

□ 감리기술검토서(모노레일 설치건)[동원15-12, 2015. 10. 12]

주요 실정보고 내용

□ 인왕지구 공사현장은 험준한 산악지역으로서, 공사용자재를 안전하고 신속하게 운반기기 위하여 모노레일을 설치하고자 함.

모노레일 설치 계획

구 간	사직동측 등산로(124m)
설치기간	2015. 10. ~ 2015. 12. 31.
설치비용	19,554,000원(부가세 별도)

감리 검토 내용

□ 인왕지구 공사현장은 험준한 산악지역으로 공사용자재를 안전하고 신속하게 운반하기 위하여 모노레일을 설치하여 기계화운반을 하는 것이 타당함.

보고자 의견

□ 실정보고 사항을 검토한 결과 감리 검토의견이 타당하여 승인

□ 승인사항은 감리원에게 통보하여 추후 설계변경 시 반영될 수 있도록 조치하고자 함.

붙임  감리기술검토서(모노레일 설치 건) 1부.  끝.