문서번호	급수운영과-28761
결재일자	2015.10.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
박상열		김태형	10/29 최명익
협조

설계변경 심의결과 보고

(자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

『자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사』

설계변경 심의결과 보고

『자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사』의 설계변경 심의   결과 보고임.

□ 설계변경 개요

가. 공 사 명 : 자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2015.05.01. ~ 10.31.

다. 설계변경 금액 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
도 급 비	492,201,500	524,100,000	증)31,898,500
공급가액	447,455,909	476,454,546	증)28,998,637
부 가 세	4,745,591	47,645,454	증) 2,899,863

□ 심의내용

가. 일    시 : 2015.10.29(목) 10:30

나. 심 의 자 : 급수운영과장 외 4명

다. 심의내용

○ 신규공종 발생 및 물량 증∙감 발생에 따른 설계변경의 타당성 검토

□ 심의결과

위 검토내용에 대하여 심의위원 모두 적정하다는 심의의견을 제시함.

□ 조치의견

위와 같이 설계변경 심의위원회 개최결과 의결내용이 적정한 바, 설계변경에

반영하여 본청 재무과에 변경계약 의뢰 하고자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경 심의의결서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.