투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	기전설비과장
(경유)
제목	변경계약체결통보 - 2015년 신곡수중보 관리동 수도배관 교체 공사

1. 기전설비과-1622(2015.10.29.)호 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 계약이 체결되었음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

계 약 현 황	공 사 명	2015년 신곡수중보 관리동 수도배관 교체 공사
	계약상대자	케이원에코텍 주식회사 (대표 : 김종학)
	계 약 일 자	2015.10.12
변 경 내 역	내 용	계약금액 변경 (증 3,151,000원), 계약기간 변경 없음
	변경사유	물량증감 및 제경비 정산액 반영
기 간 변 경	변경전 착공일자	2015.10.12	변경후 착공일자	2015.10.12
	변경전 준공기한	2015.11.05	변경후 준공기한	2015.11.05
금 액 변 경	변 경 전	************
	변경금액	증 3,151,000 원
	변 경 후	***********원

붙    임 :  변경계약체결통보서 1부. 끝.

	총무부장
주무관	심옥경		총무과장	代임재선		총무부장	10/30 이상국
협조자
시행	총무과-18378	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개