문서번호	기전과-7606
결재일자	2015.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
신대중		문준호	11/02 최주용
협조
	주무관		이현은

비상벨출동서비스 및 유지관리 용역 계약변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

성동도로사업소

(기  전  과)

비상벨출동서비스 및 유지관리 계약변경 보고

금호·옥수터널 보도차단벽을 설치하며 시설된 비상벨의 비상출동 및 유지관리를 신내·능산지하차도 용역계약에 증액하여 유지관리코자 함

□ 계약현황

○ 계약명 : 2015년 비상벨출동서비스 및 유지관리

○ 계약기간 : 2015.03.01. ~ 2015.12.31.

○ 계약금액 : 3,058,050원

○ 계약자 : ㈜911무인경비시스템 박종철

□ 신규시설현황

구분	합계	금호터널	옥수터널
CCTV	4	2	2
비상벨	7	5	2

□ 계약금액변경                                         (단위 : 원)

구분	변경전	변경후	증감	비고
계약금액	3,058,050	3,812,130	754,080

※금호·옥수터널의 11~12월 비상벨출동서비스 및 유지관리 금액 증액임

□ 계약변경 사유

○ 금호·옥수터널의 신규 시설물 확충하여 유지관리 대상 추가분의 증액 계약변경

□ 예산과목

○ 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비(401-01)

□ 향후계획

○ 2015년 9회차 10회차 기성에 포함하여 지급

첨  부 : 1) 금호,옥수터널 비상벨 관제 및 유지보수 견적서 1부. 끝.