투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	변경계약의뢰(소화조 및 저류조 협잡물 제거용역 설계변경)

1. 우리센터 소화조 및 저류조 협잡물 제거용역과 관련하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 소화조 및 저류조 협잡물 제거용역

나*********한성성업  대표  김 용 조

다. 당초계약금액 : 금196,590,000원

********************2015.7.21 ~ 2015.12.31.

마. 설계변경내용

사 업 명	당 초 금 액	변 경 금 액	비 고(증감)
소화조 및 저류조 협잡물 제거용역	196,590,000원	174,405,000원	감)22,185,000원

*****변경사유 : #2 소화조 1개소 제외, 반류수 저류조 추가청소 및 정산

사. 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터 공통분야유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

첨  부 : 관련서류 각 1부.    끝.

	슬러지재활용과장
지방공업사무관대우	김용찬		슬러지재활용과장	전결 11/03 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-8523	(		)	접수		(		)
우		서울시 성동구 송정동 73번지	/
전화	02-2211-2593	/전송	02-2211-2599	/	kyc8112@seoul.go.kr	/	대시민공개