문서번호	방재시설부-15122
결재일자	2015.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
이성하		김흥근	전결 11/11 임춘근
협 조

- 합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사 -

건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료 반영 검토보고

2015. 11

도시기반시설본부

방재시설부

- 합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사 -

건설기계 대여대금 지급보증서 발급 수수료 반영 검토보고

우리 본부에서 시행중인「합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사」와 관련, 위탁감독기관인 서울시설관리공단으로부터 건설산업기본법 개정에 따른 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료 반영에 대한 실정보고가 제출되어 이에 대한 검토보고임

□ 관련문서

□ 서울시설관리공단 공사감독1처-10416호(2015.11.11) : 공사실정 검토보고서(건설기계 대여대금 지급보증 발급 수수료 반영건) 제출

□ 공사개요

□ 공 사 명 : 합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사

□ 공사위치 : 마포구 합정동 196-4, 성산동 99-5 일원

□ 공사규모 : 빗물펌프장 증설 2개소(합정펌프장, 중동펌프장)

□ 공사기간 : 2013. 1. 4 ~ 2016. 4. 30

□ 도 급 비 : 5,094,045천원

□ 시공사/감리사 : (주)금강주택 / 서울시설관리공단

□ 시설관리공단 보고내용

□  본 공사 입찰 입찰공고 이후 건설산업기본법 개정으로 동법 제68조의 3(건설기계 대여대급 지급보증)에 따라 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 수수료가 의무화되어 추후 설계변경시(9회) 공사원가계산서에 반영코자 함

․ 입찰공고일 : 2012.12.11  · 법령개정일 : 2013.6.19

□ 보증서 발급수수료 : (재료비+직접노무비+산출경비)× 토목공사(0.41%)

(단위 : 원)

구 분	재 료 비	직접 노무비	산 출 경 비	계
전 체	1,401,776,661	1,438,787,377	380,789,838	3,221,353,876
기성금액	665,673,784	733,495,300	184,146,913	1,583,315,997
잔 여 액	736,102,877	705,292,077	196,642,925	1,638,037,879
보증수수료	산출금액 : 1,638,037,879원 × 0.41% = 6,715,955원

□  개략공사비

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비고
직접공사비	1,638,037,879	1,638,037,879	-
보증수수료	-	6,715,955	증) 6,715,955
제 경 비	821,662,827	823,911,872	증) 2,249,045
도 급 액	2,459,700,706	2,468,665,706	증) 8,965,000

□  검토의견 : 건설기계 대여대금 지급보증 발급수수료는 설계변경(9회)으로 계약금액 조정 후 실정산 조치

□ 조치계획

□ 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료는 관련 법령개정에 따른 사항으로, 잔여공정에 의거 산출된 금액을 공사계약일반조건 제21조제⑤항 3호에 의거 설계 변경시 반영하고, 추후 실 정산토록 승인통보하고자 합니다.

붙임 : 서울시설관리공단 문서 1부.  끝.