문서번호	정수시설과-4069
결재일자	2015.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
최병일		윤종민	11/17 이성재
협 조
	주무관			김인준

설계변경 계획보고

[2015년 정수장 자동제어설비(DCS)유지관리용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

설계변경 계획보고

[2015년 정수장 자동제어설비(DCS)유지관리용역]

2.3계열 여과지 철거에 따른 유지관리대상 감소로 자동제어설비(DCS) 유지관리용역 대상이 변경되어 이를 반영하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

◯ 사 업 명 : 2015년 정수장 자동제어설비(DCS) 유지관리용역

◯ 사업기간 : 2015.04.01. ~ 2016. 03. 31

◯ 계약금액 : 금6,940,000원

◯ 계 약 자 : (주)비츠로시스 대표 장우석

◯ 사업내용

- 장애 및 사고 긴급복구

- 데이터 송수신 상태 및 데이터베이스 백업 등

- DCS시스템 정상동작 확인 및 성능 모니터링 등

Ⅱ		설계변경 사항

○ 설계변경 사유

- 2.3계열 여과지 철거에 따른 유지보수 대상물량 감소

○ 변경내용

- 반영기간: 2015.10.1. ∼2016.3.31.

- 계약금액: 1,050,000원 감소

구 분	변경 전	변경 후	비고
계약금액[천원]	6,940	5,890	1,050감소

- 세부변경내역(DCS): 총 2개소 감소

구분	위치	변경설비	비고
제거	2.3계열	2.3여과지,2.3침전지,2.3응집지	2개소 감소

Ⅲ		조치계획

○ 상기 변경내용의 적정성에 대하여 설계변경심의회를 개최하고자 하며,

○ 심의결과를 반영하여 설계변경 계약을 하고자 함

붙   임 : 1. 변경내역서 3부. 끝.