투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	계역변경 의뢰(제2처리장 계면측정기 자동제어설비 구축공사)

1. 물재생과-7638(2015.11.18.)호와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 시행중인『2처리장 계면측정기 자동제어설비 구축공사』건에 대하여 아래와 같이 계약변경(계약기간변경)을 시행하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2처리장 계면측정기 자동제어설비 구축공사

나. 계 약 자 : ㈜이일엔지니어링 대표 : 정찬명

다. 계약기간 : 2015. 10. 20. ~ 2015. 11. 18..

라. 변경내역(계약기간변경)

계약금액	당 초	금54,956,000원
	변경후	금54,956,000원
계약기간변경	당 초	2015.10.20 ~ 2015.11.18.
	변경후	2015.10.20 ~ 2015.11.30.

마. 변경사유 : 자동제어설비 구축 공사구간(제3처리장 B계열)이 타공사 진행중으로 공정 수행 제반여건을 갖추고 있지 않아 계약기간 연장 필요.

바. 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재센터 수처리 유지보수, 시설비

붙임 :   계약변경 보고서 및. 합의각서 각 1부. 끝.

	물재생과장
★주무관	김석수		물재생과장	11/18 강병수
협조자
시행	물재생과-7641	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	2211-2553	/전송	2211-2579	/	seoksu99@seoul.go.kr	/	부분공개(5)