문서번호	교통정책과-25122
결재일자	2015.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정1부시장 방침 제430호

					시 민
주무관	교통정책과장	교통기획관	도시교통본부장		행정1부시장
전하연	이원목	윤종장	신용목		11/19 류경기
협 조
	도시철도관리팀장			김동완

‘우이-신설’ 경전철 역명제정 추진계획

2015. 11. 19.

서  울  특  별  시

(도시교통본부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

‘우이-신설’ 경전철 역명제정 추진계획

□ `16.12월  ‘우이-신설’ 경전철 개통을 앞두고 역명을 제정하여 개통 준비에 만전을 기하고자 함

1		사업 개요

○ 공사구간 : 우이동~신설동 11.4㎞, 정거장 13개소(2, 4, 6호선 환승)

○ 사업기간 : ’09. 9.15 ~ ’16.11.30

○ 총사업비 : 8,122억원 (`06년 불변가 6,465억원 : 국 899억, 시 2,099억, 민간 3,467억)

○ 사업방식 : BTO (운영기간 30년)

○ 시 행 자 : 우이신설 경전철 주식회사

○ 시 공 사 : 4개 공구 (1공구 : 대우, 2공구 : 두산, 3공구 : 고려개발, 4공구 : 포스코)

○ 추진현황 : 공정률 78% (`15.11.17. 기준)

< 노  선  도 >

2		사업 추진현황

□ 차량현황 : 총 36량 반입 완료(’15.9.12 ~ 10.21)

○ 차량형식 : AGT 철제차륜 (현대로템 제작, 무인 자동운전)

○ 편 성 수 : 18편성 (2량 1편성, 예비 2편성 포함, 총 36량)

○ 승차정원 : 174명 (좌석 48명, 입석 126명, 혼잡도 100% 기준)

□ 시설 및 구조물 건설현황 : 공정률 78%

○ 지상구조물 설치역사 (5개 역 : L02, L03, L04, L05, L07)

- 지하1층 : 대합실, 개찰구, 승강장, 기계실

- 1층	: 지하철 출입구, 대합실, 화장실 및 승강시설

- 2~4층 : 기계‧전기실, 사무실 등 기능실, 일부공간은 부대사업 계획 중

구 분	L02	L03	L04	L05	L07
지상구조물	2동	1동	1동	1동	1동
층 수	지하1층~3‧4층	지하1층~3층	지하1층~4층	지하1층~4층	지하3층~4층

○ 지하역사 (8개 역 : L01, L06, L08, L09, L10, L11, L12, L13)

- 단층역(L01)은 공간 협소, 환승역은 대합실 및 환승통로 공간활용 가능

구 분	L01	L06	L08	L09	L10	L11	L12	L13
층 수	지하1층	지하3층	지하4층	지하2층	지하3층	지하4층	지하4층	지하2층
비 고	-	-	-	-	-	4호선환승	6호선환승	2호선환승

<향후 추진일정>

∘ ’15.12~’16. 9	공종별 시험 (도기본. 사업시행자)

∘ ’15.12~	교통부문(변경요금 및 요금차액 지원제도) 추가협상 (교통본부)

∘ ’16. 5	요금신고 (사업시행자) 및 시의회 보고 (교통본부)

∘ ’16.10~11	영업시운전  (도기본, 교통본부. 사업시행자)

∘ ’16.11	완공   ∘ ’16.12 개통

3		역명 제정 개요

□ 관련근거

○ 서울시지명위원회 조례 제5조(의견제시)

○ 역명 제·개정 절차 및 기준 (행정2부시장 방침 제440호, ’09.8.28)

□ 제정대상 : 10개역 (3개역은 환승역으로 기 사용 중인 역명 사용)

○ 강북구 : 8개역, 성북구 : 2개역

연번	자치구별	역사	위 치	연번	자치구별	역사	위 치	비 고
1	강북구	L01	우이동 16-20 일대	8	강북구	L08	미아동 1353-20 일대
2	〃	L02	우이동 57-28 일대	9	성북구	L09	정릉동 286-19 일대
3	〃	L03	우이동 72-186 일대	10	〃	L10	정릉동 139-80 일대
4	〃	L04	수유동 338-46 일대	11	〃	L11	동선동 1가 116-1 일대	4호선 환승역 (성신여대역)
5	〃	L05	수유동 472-677 일대
				12	〃	L12	보문동 1가 127-6 일대	6호선 환승역 (보문역)
6	〃	L06	미아동 791-4703 일대
				13	동대문구	L13	신설동 132-259 일대	1․2호선 환승역 (신설동역)
7	〃	L07	미아동 745-142 일대

□ 추진절차

사전절차 이행 및 제정안 제출	➠	도시철도 운영기관 의견 수렴	➠	市지명위원회 상정 자문	➠	역명 결정 방침 수립	➠	외국어표기 자문, 시보 고시
주민의견 수렴, 區지명위원회 의결 (자치구 → 市)		(도시철도운영기관 ↔ 市교통정책과)		(市교통정책과 → 市자치행정과)		(市교통정책과)		(市교통정책과)
`15.12.31		`16. 1. 15		`16. 2월		`16. 3월		`16. 3~4월

□ 추진일정

○ 주민의견수렴, 區지명위원회 의결 및 제정안 제출  : `15.12.31

○ 도시철도 운영기관 의견 수렴                     : `16. 1.15

○ 市 지명위원회 자문                              : `16. 2월

○ 역명결정 방침 수립, 외국어 표기 자문, 시보 고시 : `16. 3 ~ 4월

붙 임

역명의 제정 기준

□ 역명제정 원칙

○ 역명은 일반적으로 가장 많이 불리우며 해당지역과의 연관성이 뚜렷하고 지역실정에 부합하는 옛 지명 또는 법정동명, 가로명 등을 원칙으로 함.

○ 다만, 위의 명칭이 이미 다른 역명으로 쓰이고 있거나, 역이 여러 개의 행정구역에 걸쳐 소재할 경우에는 다음의 하나로 정함.

1. 역사에 인접하고 있는 고적, 사적 등 문화재 명칭

2. 이전의 우려가 없고 고유명사화 된 주요 공공시설명

3. 지역을 대표하는 다중이용시설 또는 역의 위치를 쉽게 알 수 있는 지역 명칭

4. 학교명이나 특정시설명은 역명으로 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되, 역사가 특정 부지 내에 위치하고 있고 그 시설물이 대표 지역명으로 인지가 가능한 경우에는 그 시설명

□ 역명 제정시 배제 기준

○ 행정동명 및 건물명 등 가변성이 있는 명칭

○ 지명에 접두사/접미사 또는 형용사가 붙는 경우

‣ 신○○, 구○○, ○○앞, ○○입구, ○○삼거리, ○○네거리 등

※  다만, 이미 지명화 되어 통용되고 있는 경우는 예외로 함

○ 다른 지방에서 이미 역명으로 쓰이고 있는 명칭은 가급적 배제

○ 혐오, 듣기 거북한 명칭 등 향후 분쟁 또는 논란이 될 수 있는 명칭

○ 기타 특정기관 및 업체의 홍보수단으로 이용될 수 있는 명칭 등