문서번호	시설관리과-29201
결재일자	2015.11.24.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
구본천		11/24 우종근
협조
	주무관		최희권

상수도 이설 착공계 제출에 따른 검토보고

【도림1배수분구 5구역3블록 상수도 이설공사(대림동 1113번지일대)】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

상수도 이설 착공계 제출에 따른 검토보고

【도림1배수분구 5구역3블록 상수도 이설공사(대림동 1113번지일대)】

영등포구청 안전치수과************************************************************

관련근거

안전치수과-25836(2015.11.19.)호와 관련임『착공계 제출』

******

********** 도림1배수분구 5구역3블록하수관거 종합정비공사

구간 내*********

공사위치 : 대림동 1113번지, 804-21번지 주변

이설일자 : '15. 11. 27. ~ ‘15. 11. 30.

이설개요 : D=100mm  L=30m(※ 중간밸브, 공기변 신설 포함)

D=150mm  L=9m(※ 공기변 신설 포함)

단수일시 : ‘15. 11. 27 ~11. 30 일중 2일 공사(단수시간 일2~3시간)

단수세대 : 20세대

시공회사 : ***************

단수계획

연번	단 수 위 치	단수예정일	단수예정시간	단수세대	작업일수
1	대림동 804-21번지 일대	11.27	09:00~11:00	10세대	1일
2	대림동 1113번지 일대	11.30	14:00~17:00	10세대	1일

단수세대 급수방안

현장 확인결과 위 단수세대 건물은 약 20세대이며, 사전 공사 관련 홍보 및 협의를 통해 주간공사를 신속히 시행하여 급수불편을 최소화 함.

홍보계획

단수안내문 배포 및 부착(청구건설)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사 1일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

홈페이지 단수안내 게재

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내(남부수도사업소)

민원발생이 많은 영업집 단수안내(청구건설)

- 음식점, 교회 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접방문하여   단수안내문을 전달하고 사유를 설명.

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 물탱크 등에 받아 충분히 사용토록 안내.

급수차지원(남부수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차 지원요청시 남부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

공사 관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
****	*********	*************
*********	***	*************
*****	**********	*********
	****************	*************

시공참여자

연번	업 무	성 명	주민등록번호	주 소	자격사항
*	****	***	*******	***************	****
*	***	***	*******	****************	****
*	***	***	*******	*****************	****
*	***	***	*******	*****************	****
*	***	***	*******	*****************	****
*	*****	***	*******	******************

검토 및 처리의견

영등포구청 안전치수과는 청구건설이 단수 홍보계획에 따라 홍보를 차질 없이 진행할 수 있도록 관리 감독하여 급수운영에 지장이 없도록 조치

계획된 시간내에 배수관로 연결작업이 완료 될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고, 단수시간이 최소화 되도록 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보

조치의견

본 계획을 영등포구청 안전치수과에 통보하여 상수도시설 이설공사와 관련하여 단수작업 및 수돗물 공급에 차질이 없도록 조치하고자 함

첨 부 :  1. 착공계, 단수안내문 각1부.

2. 시공계획서, 자재목록 각1부.

3. 표준하도급계약서 1부.  끝.