문서번호	급수운영과-31596
결재일자	2015.11.26.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
최호림		김태형	11/26 최명익
협조

설계변경 보고서

[2015년 광진구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

동부수도사업소

급수운영과

2015년 광진구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역

설계 변경 보고서(최종)

『2015년 광진구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역』 시행 중 시공물량 증․감 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행코자 합니다.

1				용역현황

○ 용 역 명 : 2015년 광진구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역

○ 용역개요 : 폐기물운반 - 910㎥, 폐기물처리 – 2,131ton(폐아스콘 2,068t 무대)

○ 용역기간 : 2015. 05. 12. ~ 2015. 11. 30.

○ 용역수행자 : ***************

○ 용 역 비 : ***********

2				설계변경 개요

○ 설계변경 사유 : 시공물량 증･감 발생

- 시공물량 증･감 현황

․ 폐아스콘 및 폐콘크리트, 폐토석 운반․처리 물량 증가 및 감소

․ 동일로 송배수관정비공사 폐아스콘 물량증가 : 공사감독2처-13567호(2015.09.02.)        굴착구간 포장(A-1) 두께(30cm~50cm) 증가로 물량증가

․ 아차산로 배수관부설공사 폐아스콘 물량증가 : 공사감독2처-12686호(2015.08.21.)        굴착구간 포장(A-1) 두께(30cm~80cm) 증가로 물량증가

구분	건설폐기물 운반(㎥)		건설폐기물 처리(Ton)		비고
	당초	변경	당초	변경
폐아스콘	880	1,306	2,068	3,069	증
폐콘크리트	20	73	46	168	증
폐토석	10	-	17	-	감
합계	774	1,379	2,131	3,237	증

3				공사비 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감
용 역 비	**********	**********	**************
공급가액	**********	**********	**************
부가가치세	*********	*********	*************

4				보고자 의견

○ 위와 같은 실정으로 설계변경 사항이 발생하여 우리사업소 설계변경 심의위원회를 개최하여 타당성 여부 등을 검토하고 심의결과에 의거 설계변경을 시행코자 합니다.

첨부 : 설계변경 내역서 1부.  끝.