서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	2015년 수질오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질 유량 모니터링 용역 계약변경 의뢰

1. 물관리정책과-10553(2015.06.25.)호 및 물관리정책과-10673(2015.6.26)호와 관련입니다.

2. “2015년 수질오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질 유량 모니터링 용역”에 대하여 아래와 같이 계약변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2015년 수질오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질 유량 모니터링 용역

나. 용역기간 : 2015.03.19.-2015.12.10

다. 계약금액 : 금47,089,700원

라. 계 약 자 : 자연종합환경(주)

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	금47,089,700원	금43,770,700원	감)금3,319,000원

마. 계약변경 내용

바. 변경사유 : 시료채취를 위한 강우일수 부족으로 비점저감시설에 대한 수질모니터링 횟수 감소

사. 예산과목 : 물순환안전국, 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 한강수질개선, 수질오염총량관리사업, 연구용역비

붙 임 : 1. 2015년 수질오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질 유량 모니터링 용역 설계변경 방침 1부.

2. 설계(변경) 내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	물순환정책과장
주무관	김성영		오염총량팀장	정병권		물순환정책과장	전결 11/26 최진석
협조자	물순환행정팀장	代이윤수		계약2팀장	홍연화
시행	물순환정책과-5444	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02) 2133-3771	/전송	02) 2133-1041	/	kimseong@seoul.go.kr	/	대시민공개