문서번호	도시철도사업부-10490
결재일자	2015.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		경전철1과장	도시철도사업부장
김상엽		박동룡	11/27 권영찬
협조

11월 4주차 휴일 감리근무계획 승인 검토보고(우이3공구)

2015. 11.

도시기반시설본부

도시철도사업부

「우이~신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구)」

2015년 11월 4주차 휴일 감리근무계획 승인 검토보고

우이～신설 도시철도 민간투자사업(3공구) 건설공사 관련 시공사의 휴일 작업계획에 대하여 책임감리사가 시공사에 이를 승인 통보하고, 감리원 근무 계획 승인요청을 하여 검토 보고함

휴일근무(11월 4주차) 승인 요청내용

관련근거

- 동일감(우이) 제15-826호(2015.11.25)

근 무 일 : 11.28(토),11.29(일)

휴일근무 계획

관련근거

- 입찰안내서 제4장 계약조건 제14조 및 제6장 6.2

- 책임감리 현장참여자 업무지침서 제5조③항(감리원의 근무수칙)

근무사유

- 원활한 공정추진을 위한 연속적인 작업시행을 통해 지연된 본선터널 굴진작업과 정거장의 토공 및 가시설, 구조물 공정을 촉진하여 시민불편 해소와 안전, 품질관리에 만전을 기하기 위함.

감리원 휴일근무 내용

근무일자	근무형태	시공사 작업 주요내용	비고
11월 28일(토)	감리원 1명	∙ 정거장(L08): 출입구 토공/토류판 설치, 철근가공 및 배근 ∙ 환기구(L07) : 지장물 기초 거푸집 설치 ∙ 환기구(L08) : 수평부 숏크리트 타설
11월 29일(일)	감리원 1명	∙ 정거장(L08): 출입구 토공/토류판 설치, 철근가공 및 배근 ∙ 환기구(L07) : 지장물 기초 거푸집 설치 ∙ 환기구(L08) : 수평부 천공·할암

검토결과

책임감리원의 검토내용과 같이 원활한 공정추진을 위한 연속적인 작업시행을 위하여 아래와 같이 휴일작업 승인조건을 부여하고 감리원의 휴일근무 계획을 승인코자 합니다.

< 책임감리 휴일작업 승인조건 >

- 휴일작업에 감리비는 시공사 부담 (입찰안내서 제6장 6.2  원인자 부담)

- 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

- 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것

- 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독할 것

< 업무지시 >

- 감리원은 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리 등 철저

- 감리자 및 현장 공사관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

- 휴일 작업계획의 변경시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업시행토록 할 것

- 사고 발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련절차에 따라 상황 보고토록 할 것

- 작업구간 정기순찰 점검실시 : 도로침하 및 파손 점검,화재예방 점검 등

- 휴일작업시 발파를 지양하고 소음, 진동발생, 교통관리 작업관리 철저

- 소음, 진동을 수반하는 공종의 작업시간 준수 및 민원발생 관리철저

붙임 : 휴일작업에 따른 감리근무계획 승인요청 1부.  끝.