문서번호	산지방재과-12648
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
유진석		정상모	12/08 김영수
협조

서대문구 낙찰차액 사용승인요청에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

푸른도시국

(산지방재과)

낙찰차액 사용승인요청에 대한 검토보고

서대문구에서 시행중인 영천동 5-631 위험절개지 정비공사 진행 중 주민협조 요구사항 및 현장여건 변경으로 인한 관급자재를 추가 구매코자 낙찰차액 사용승인을 요청한 사항임.

1. 관련근거 : 서대문구 푸른도시과-20823(2015.12.07)호와 관련임.

2. 공사개요 및 현황

○ 공 사 명 : 영천동 5-631 위험절개지 정비공사

○ 공사금액 : 471,500천원(도급비 425,814천원, 관급비 45,686천원)

○ 공사기간 : 2015. 11. 13 ~ 2016. 2. 20

○ 낙찰차액 사용금액 : 59,391천원

(단위 : 천원)

배 정 액	계약금액	낙찰차액	승인요청금액
533,000	472,038	60,962	59,391

○ 낙찰차액 사용사유

ㆍ 낙석방지책 기초 타설식 설치로 인한 관급자재 구매

ㆍ 주민요구 및 협의사항 : 철거난간을 재설치시 경관을 고려한 디자인 난간 설치

3. 조치계획

○ 서대문구에서 시행중인“영천동 5-631 위험절개지 정비공사”에 주민협조 요구사항 및 현장 여건변경으로 인한 관급자재를 추가 구매하고자 낙찰차액 사용승인을 요청한 사항으로

○ 본 사업의 원활한 진행을 위해 낙찰차액 활용을 승인하고 사면정비에 만전을 기하도록 통보코자 함.

붙임 : 1. 예산지원요청 공문 1부.

2. 검토보고서 1부. 끝.