문서번호	생태공원과-134
결재일자	2014.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
양순옥		이해룡	01/17 이용태
협조

『양화 한강공원 친수공간 조성공사』 관련

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

한강사업본부

(생태공원과)

『양화 한강공원 친수공간 조성공사』 관련

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

Ⅰ		공 사 개 요

위    치 : 영등포구 양평동 양화한강공원내(성산대교 남단 상류)

공사기간 : 2013. 12. 27 ~ 2014. 12. 26

공사내용 : 물놀이장 1,700㎡, 자연형호안 240m, 산책로 270m, 실개천 51m, 주차장 15,300㎡ 등

감독기관 : 서울특별시시설관리공단

Ⅱ		관급자재 납품연기 검토

공 사 명 : 양화한강공원 친수공간 조성공사

품    명 : 식물매트(물억새, 수크령)

납품기간 : 2013. 12. 6 ～ 2014. 1. 30

계약내용 : 64,948,840원

가. 자  재  대 : 64,600,000원

나. 조달 수수료 : 348,840원

□ 관급자재 구매내역

구 분	품 명	수량	금 액(원)	계약기간	계 약 자	비 고
1	식물매트(물억새)	600㎡	20,400,000	’13.12.06～’14.01.30	지엔지농원	현장도착도
2	식물매트(수크령)	1,300㎡	44,200,000	’13.12.06～’14.01.30	지엔지농원	현장도착도
소 계			64,600,000
조달수수료			348,840			원단위 절사
합 계			64,948,840

납품장소 : 영등포구 양평동 양화한강공원내

납품기한 연기

- 당  초 : 2014. 01. 30까지

- 변  경 : 2014. 10. 26까지

연기사유 귀책소재 : 서울특별시 한강사업본부

지체상금 부과여부 : 미부과

연기사유 : 동절기 공사중지에 따른 선행공정 지연으로 관급자재 납품기한을 연기하고자 함

※ 본공사 1차분 준공기한 : 2014. 10. 26

Ⅲ		조 치 계 획

총무과에 관급자재 납품연기 계약 의뢰하고 공사감독부서에 통보하여 현장시공에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 관련공문 1부.  끝.