문서번호	교량안전과-7107
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
우창원		이수근	12/16 代하현석
협조

설계변경 시행계획 보고(동호대교외 2개소 보수공사 건설폐기물 처리용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

설계변경 시행계획 보고

(동호대교외 2개소 보수공사 건설폐기물 처리용역)

동호대교외 2개소 보수공사에 대한 건설폐기물 처리용역 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 용역개요

◦ 용 역 명 : 동호대교외 2개소 보수공사 건설폐기물 처리용역

◦ 용역기간 : 2015.7.16 ~ 2015.12.31.

◦ 용역금액 : 31,230,000원

◦ 대상공사 : 동호대교 보수공사, 동호대교 기초구조물(우물통)보수공사, 원효대교 보수공사

◦ 용역개요 : 폐콘크리트 527톤, 폐아스콘 1,273톤, 혼합폐기물 141톤

◦ 용 역 사 : 우성개발외 1개사

□ 설계변경 사유

◦ 공사장별 폐기물처리 물량 증.감

- 동호대교 보수공사 : 아스팔트 포장두께 변경에 따라 물량감소

- 동호대교 기초구조물(우물통)보수공사 : 우물통3기 추가보수

- 원효대교 보수공사 : 폐기물 미발생

◦ 변경 내역

- 폐기물 처리비 증.감내역

사업명	설계변경 내역(원)		증.감	비 고
	당 초	변 경
동호대교 보수공사	16,714,000	14,938,000	감)1,776,000
동호대교 기초구조물 (우물통)보수공사	5,464,000	5,698,000	증)234,000
원효대교 보수공사	9,052,000	0	감)9,052,000
합 계	31,230,000	20,636,000	감)10,594,000

- 폐기물 처리 물량 증.감 내역

사업명	폐기물처리 현황(톤)						비고
	폐콘크리트		폐아스콘(평삭재)		폐아스콘(혼폐)
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
동호대교 보수공사	74	87	939	768	104	100
동호대교 기초구조물 (우물통)보수공사	272	284
원효대교 보수공사	181		334		37
합 계	527	371	1,273	768	141	100

□ 향후계획

◦ 상기와 같이 설계변경을 시행하고 변경계약을 재무과에 의뢰코자 함

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 수량산출서 1부.  끝.