투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(최종)시행에 따른 재계약 의뢰(관내 포장도로불량맨홀정비공사-연간단가)

1. 도로보수과-9570호(2015.12.16.) 설계변경 시행과 관련입니다

2. 우리사업소에서 시행중인 『2015년 관내 포장도로불량맨홀 정비공사-연간단가』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행하고 재계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사

나. 도 급 자 : ㈜태강디앤씨 대표 최성숙

다. 공사기간 : 2015. 5. 21. ~ 2015. 12. 31.

라. 설계변경내역                                      (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	감	비 고
총 공 사 비		₩574,000,000	₩572,270,000	-₩1,730,000
도급비	공급가액	₩521,818,182	₩520,245,455	-₩1,572,727
	부가가치세	₩ 52,181,818	₩ 52,024,545	-₩ 157,273
	계	₩574,000,000	₩572,270,000	-₩1,730,000

마. 변경사유

- 맨홀 관리기관 공종별 시공 물량 증, 감

바. 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후포장도로정비, 시설비 및 부대비(시설비)

붙  임 : 1. 설계변경(최종) 시행 공문 1부.

2. 설계변경(최종)사유서 1부.

3. 설계변경(최종) 검토보고 1부.

4. 설계변경 내역서(최종) 1부.

5. 합의각서 1부.   끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	정용재		주무관	송광석		도로보수과장	12/18 김환겸
협조자
시행	도로보수과-9692	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0350	/전송	02-2040-0307	/		/	대시민공개