문서번호	시설과-9514
결재일자	2015.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
윤영면		한종수	12/18 김한준
협조

2015년 청소근로 환경시설

실정보고 및 설계변경 검토보고

2015. 12

중부공원녹지사업소

(시설과)

2015년 청소근로 환경시설 개선공사(건축설비)

실정보고 및 설계변경 검토보고

2015년 청소근로 환경시설 개선공사(건축설비)와 관련하여 시공사로부터 실정사항이 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

□ 사업개요

○ 위    치 : 낙산, 간데메, 노들텃밭

○ 공사기간 : ‘15.11.30 ~  ‘16.01.21

○ 총공사비 : 8,399천원

○ 도 급 자 : ㈜ 신일코어스 (대표 이세란)

□ 실정보고 및 검토내용

공 종	실 정 보 고	검 토 결 과	비고
위생배관 공 사	▸수도꼭지 설치 검토 요청 - 설계 누락 : 4개소	▸수도꼭지 설치 : 4개소 필요	반영
	▸샤워실 바닥 높이 조정 - 시멘트 몰탈 v = 0.71㎡	▸바닥 높이 조정 : 필요	반영
합 계	개략공사비 497천원

□ 보고자 의견

○ 상기와 같이 예산범위 내에서 현장여건에 맞게 설계변경하고 계약코자함.

붙임: 1. 실정보고 1부.

2. 건축설비(추가분) 1부.  끝.