문서번호	기반시설과-2086
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기반시설과장	시설부장		한강사업본부장
권혁제	한흥태	박상돈		12/22 고홍석
협 조
	총무과장		代임재선
	기획예산과장		박병현
	주무관		곽영만
	주무관		최규석

암사초록길 조성공사 공사기간 연장 보고

2015. 12.  .

시설부 기반시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

암사 초록길 조성공사 공사기간 연장 보고

올림픽대로 일부구간을 지하화하고 상부에 보행로를 조성하는     암사초록길 조성사업의 사업기간 연장에 대해 보고 드림.

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 강동구 암사동 164일대 (올림픽대로 상)

○ 사업규모 : 초록길 조성 50m, 상부공원 조성 4,800㎡

올림픽대로 지하화 870m(지하차도 50m)

○ 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 내 역		사 업 비	기 투 자	2015년	2016년	‘17년 이후
총 계		24,800	1,073	-	2,000	21,727
	설계비	861	861	-	-	-
	시설비	22,339	212	-	1,900	20,227
	감리비	1,600	-	-	100	1,500

※투자내역 : 설계비 : 861백만원 (‘11년)

시설비 : 180백만원 (12년, 교통처리계획비 등)

32백만원 (14년, 지장물 탐사비)

○ 사업기간 : '11. 3. 21 ～ '15. 12. 31 (장기계속공사)

○ 시 공 자 : 뉴프린스종합건설 외 3개사 (도급비  9,582백만원)

□ 준공기한 연기

○ 사 유 : 시의회 예결위에서 ‘16년 사업비 반영으로, 중지된 공사 재개

- 예산결산특별위원회에서 암사초록길의 ‘16년 사업예산 20억원 반영으로, 예산

배정시 조속한 사업추진을 위해, 총공사 부기금액에 대해 계약기간 3년 연장.

○ 준공기한

- 당 초 : ‘11. 3. 21 ~ ’15. 12. 31

- 변 경 : ‘11. 3. 21 ~ ’18. 12. 31

□ 향후 추진계획

○ ‘15. 12.      : 공사 계약기간 연장 의뢰 (총무과)

○ ‘16. 1. ~ 4. : 암사초록길 보완설계 및 행정절차 추진

○ ‘16. 5. ~    : 지장물 이설, 공사용 우회도로 설치, 본공사 시행

붙 임 : 암사초록길 조성공사 추진경위 1부.   끝.