투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(용두3빗물펌프장 신설공사 폐기물처리용역 총차, 2차)

1. 우리본부에서 시행중인 「용두3빗물펌프장 신설공사 폐기물처리용역」의 준공기한(총차, 2차분)을 아래와 같이 연기의뢰하오니   조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 용두3빗물펌프장 신설공사 폐기물 처리용역

나. 용 역 비 : 79,556천원(2차분 : 21,905천원)

다. 용 역 자 : ㈜오성디엔이  대표 이두희

라. 준공기한 연기

구분	당 초	변 경	비고
총차	'13. 4. 26∼ '15. 12. 31	'13. 4. 26∼ '16. 6. 30
2차	'15. 7. 1∼ '15. 12. 31	'15. 7. 1∼ '16. 6. 30

○ 연기에 따른 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금부과여부 : 미부과

마. 연기사유 : 준공기한 검토보고서 참조

바. 예산과목 : 수자원, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 용두 빗물펌프장

시설용량증대, 시설비

붙임 : 1. 준공기한 연기검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기원 1부.

3. 합의각서 1부

4. 서울특별시시설관리공단 검토보고서 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	노태학		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	12/22 임춘근
협조자	주무관	장수철		경리과장	박환
시행	방재시설부-17453	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개