문서번호	물순환정책과-307
결재일자	2016.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	오염총량팀장	물순환정책과장		물순환안전국장
김성영	정병권	안대희		01/08 권기욱
협 조

잠실상수원수질관리계획용역 준공기한 연기보고

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

잠실상수원수질관리계획 용역
준공기한 연기 검토 보고

“잠실상수원수질관리계획 용역”과 관련하여 동계획에 대한 환경부(한강유역환경청)의 타당성검토 등의 일정이 늦어짐에 따라 준공기한 연기를 검토하고 결과를 보고 드림

		용역개요

○ 용 역 명 : 잠실상수원수질관리계획 용역

○ 용역기간 : 2015.07.29~2016.01.26

○ 계 약 액 : 금48,500,000원

○ 계 약 자 : (재)서울연구원

		검토의견

○  잠실상수원수질관리계획 용역과 관련하여 우리시에서 제출한 계획에 대한 환경부(한강유역환경청)의 타당성검토 소요시간 및 검토의견의 계획반영에 필요한 시간을 고려할 때 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기하고자 함.

- 당초 : ’15.07.29~’16.01.26 ⇒ 변경 : ’15.07.29~’16.02.26(31일 연장).

※ 타당성검토 요청(서울시→한강유역환경청) : 2015.12.10

		향후 추진계획

○ ’16.01 ~ ‘16.02 :  환경부 타당성 검토 및 검토의견 계획반영

○ ’16.02.26 : 용역준공

붙  임 : 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.