서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울연구원장
(경유)
제목	준공기한 연기 안내(잠실상수원수질관리계획 용역)

우리시에서 귀원에 위탁하여 추진 중에 있는 잠실상수원수질관리계획 용역에대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 하오니, 붙임 합의각서를 작성하여 우리시 재무과(물순환정책과 경유)에 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 잠실상수원수질관리계힉 용역

○ 용역기간 : 2015.7.29 ~ 2016.1.26

○ 용 역 비 : 48,500천원

○ 계 약 자 : (재)서울연구원

나. 준공기한 변경

당 초	변 경	비 고
2016.1.26	2016.2.26	31일 연기

○ 변경사유 : 환경부 타당성검토 소요시간 필요 및 검토의견 계획 반영에 따른 절대공기 부족

다. 지체상금 : 미부과

붙 임 : 합의각서 양식 1부.  끝

	서 울 특 별 시 장
주무관	김성영		오염총량팀장	정병권		물순환정책과장	전결 01/08 안대희
협조자
시행	물순환정책과-355	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02) 2133-3771	/전송	02) 2133-1041	/	kimseong@seoul.go.kr	/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다