문서번호	안전관리과-1615
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	안전관리과장	시설국장	도시기반시설본부장
정달영	이윤권	형태경	03/03 고인석
협 조
	도시철도국장		이정화

공무원직접수행 학술용역 추진계획

2016. 2.

	도시기반시설본부
	안전관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

공무원직접수행 학술용역 추진계획

현장에서 시공중인 동바리에 대한 구조계산, 시공 상세도의 표준안 제시, 점검 리스트 작성 등 안전시공을 위한 공무원 직접수행 학술용역을 통한 예산절감과 재해를 예방하고자 공무원직접수행 학술용역 계획 보고임

1		추진개요

추진근거

❍ 학술용역과제 공무원직접수행 계획(행정1부시장 방침 제396호, ’06.9.20)

❍ 2016년도 공무원직접수행 학술용역 운영계획(조직담당관-1683, ‘16.2.5)

추진목적

❍ 동바리 구조계산 표준(안) 연구

❍ 효율적인 시공관리를 위한 시공상세도 표준(안) 제시

❍ 시공 및 안전관리를 위한 동바리 점검 체크리스트 제시

2		연구계획

과제명

❍ 동바리붕괴 재해예방을 위한 안전시공 방안에 관한 연구

추진일정

❍ 과제수행기간 : ‘16.3.25(금) ~ ’16.9.13(화)

❍ 과제수행이후 : 구조계산 프로그램을 활용 현장의 동바리 시공계획 검토 및 시공관리 지도 등 현장의 동바리 안전시공에 직접활용

연구목표

❍ 가설구조물 중 동바리는 붕괴사고 발생빈도가 높아 작업자 사망률 등 대형사고로 연결되는 확률이 비교적 높은 공종임

- 가설구조물로 인식하여 설계 및 시공이 부실한 경우 빈번

❍ 서울시 공사현장에 실제 적용 가능한 안전안 도출

- 동바리의 구조계산 표준(안) 연구, 동바리의 효율적인 시공을

위한 시공상세도 표준(안) 제시

- 안전시공을 위한 점검리스트 모델 작성, 건설현장 동바리의

안전시공 도모

세부 연구내용

❍ 동바리 설계 및 시공 실태조사

❍ 동바리 구조계산 사례조사

❍ 동바리 조립 및 설치에 관한 안전점검 실태조사

❍ 동바리 구조계산 표준(안) 연구

❍ 효율적인 동바리 시공관리를 위한 시공상세도 표준(안) 제시

❍ 동바리 안전시공 점검리스트 제시

연구 추진 전략

❍ 동바리 설계 및 시공에 관련된 각종 도서 및 법령 검토

❍ 연구 단계별 세부항목 및 기술적 사항 전문가 자문회의 실시

❍ 직원 워크숍을 통한 동바리 안전시공 활용 및 현장 적용방안 도출

❍ 대상현장을 선정하여 동바리 관련 자료 및 실태조사

❍ 대상현장의 동바리 구조계산을 분석, 문제점 및 개선방안을 도출하여 동바리 구조계산 표준(안) 연구

❍ 연구 결과를 선정된 대상 현장에 시범 적용 후 미비점 보완

❍ 관련 도서검토 및 현장 적용 결과를 반영하여 동바리 안전시공 점검리스트 및 세부항목이 명시된 시공상세도 표준(안) 제시

3		활용방안 및 기대효과

활용방안

❍ 동바리 관련 표준(안) 제시로 미시행 되었거나 간과된 부분에 대한 계도 및 점검시 활용하여 동바리 붕괴 등 재해 사전예방

❍ 동바리 안전시공 점검리스트를 현장에 제공하여 자체에서 사전점검 및 보완 후 후속공정 진행 유도와 사전점검 활성화

❍ 동바리 구조계산 및 시공상세도 표준(안)을 활용한 관계자 교육을 통한 동바리 안전시공 도모

구조해석 프로그램 구매 및 활용(별도 예산확보)

❍ 구조해석 및 가시설해석 프로그램 구매 현장에 적용

- 동바리 안전성 검토 및 흙막이가시설의 안전성 검토에 직접 활용

❍ 직접 활용 및 검토를 위한 구조해석 및 가시설 프로그램

- 구조해석 프로그램 : Midas Civil(Advanced)

- 가시설 구조해석 프로그램 : GeoXD(Expert)

․소요예산 : 28,000천원(부가세 별도)

기대효과

❍ 경제․사회적 측면

- 건설 현장에서 자주 발생하고 있는 동바리 붕괴 사고를 미연에 방지 하고 인적․물적피해 최소화

◾동바리 구조계산의 표준안, 동바리 안전시공을 위한 시공상세도 표준안

및 안전점검 리스트 작성

◾연구결과를 건설공사 현장에 배포하여 동바리 시공의 안전도 향상

으로 재해 사전예방

◾안전사고 예방을 위한 선제적 대처로 근로자 안전확보 및 시민 신뢰도 제고

❍ 기술적 측면

- 구조계산 및 시공상세도의 표준(안)의 제시를 통해 계획단계부터 기술적 안정성 확보

- 위험도가 큰 동바리 설계가 형식적이고 부실하게 계획되거나 시공되는 문제점 해소

- 경험적으로 수행하는 동바리 시공 관행을 기술적으로 보완하여 시공의 정밀도 증진 및 구조적 안정성의 향상

- 동바리 안전시공 점검 리스트를 제시하여 하도급 업체에 적용 유도

4		향후 추진일정

연구과제 신청 및 선정

❍ 학술용역 신청(수행부서 → 조직담당관)  : ’16. 3. 3(목)

❍ 연구과제 선정심의 및 선정결과 통보	: ’16. 3. 24(목)

연구보고서 제출(수행부서 → 조직담당관) : ’16. 9. 13(화)

따로붙임 : 공무원 직접수행 연구계획서 1 부.  끝.