문서번호	시설관리과-1948
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
장준원	문용욱	이자원		01/28 이상래
협 조

‘14. 상수도관 전식방지사업 추진계획

2014. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	강서구청, 양천구청 등	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

‘14. 상수도관 전식방지사업 추진계획

상수도관 부식을 방지하기 위한 전식방지 시설을 설치하여 부식으로 인한 누수를 방지하여 유수율 향상 및 안정적 급수체계를 기여코자 함.

※ 본부 시설관리과-78(2014.01.06.) : ‘14년 상수도관 전식방지 공사 시행

예산배정 내역

사업명	예산과목			사업비 (천원)	비 고
	세항	목	세목
‘14년 상수도관 전식방지 공사	계			502,000
	구축물	시설비 및 부대비	시설비	452,000
			감리비	50,000
※ 시설비 중 설계용역비(10,000천원) 포함

‘14년 사업 추진계획

❍ 사업대상

연번	사업 구간	연장 (㎞)	수계	관경 (㎜)	설계용역 (년)	비 고
1	신월배수지앞~ 화곡로입구R	1.4	신월	900	2009	전식누수 발생구간
2	화곡로입구R~ 강서구청입구R	3.3	우장산	700	설계용역 후 공사 시행	전식누수 발생구간
3	가양역R~ 나이아가라호텔앞	2.5	목동	700	설계용역 후 공사 시행	전위보강 구간

❍ 추진방법

연번	사업 구간	연장 (㎞)	수계	관경 (㎜)	추진방법
1	신월배수지앞~ 화곡로입구R	1.4	신월	900	전식환경조사 및 설계용역(2009년) 완료 2014년 단가적용하여 내역서 수정 계약심사 후 공사 발주
2	화곡로입구R~ 강서구청입구R	3.3	우장산	700	전식 누수 발생 구간으로 전식환경조사 및 설계용역 용역결과에 따라 계약심사 후 공사시행
3	가양역R~ 나이아가라호텔앞	2.5	목동	700	희생양극 소진으로 전위불량으로 전식환경조사 및 설계용역 용역결과에 따라 계약심사 후 공사시행

❍ 추진절차

기술 용역 타당성 심사	⇨	용역발주	⇨	용역준공 및 내역서 작성	⇨	계약심사 (공사 및 감리)	⇨	발주 및 시공

❍ 추진기간 : 2014. 2. 1 ~ 8. 31

계약방법

❍ ‘14년 배수관로 전식방지 환경조사 및 설계용역(1건 용역)

- 과업대상(2개구간)

① 화곡로입구R~강서구청입구R : 3.3㎞(우장산 수계 700㎜)

➁ 가양역R~나이아가라호텔앞  : 2.5㎞(목동 수계 700㎜)

- 과업기간 : 계약일로부터 40일

- 소요예산 : 10,000천원

- 계약방법 : 전자공개수의계약

- 입찰참가자격 : 전력기술관리법 제14조 제1항의 규정에 의거 전력시설물의 설계업 등록이 되어있는 업체로서 주된 사무실이 서울시 소재인 업체

❍ ‘14년 상수도관 전식방지 공사(1건 발주)

- 공사대상(3개구간)

① 신월배수지앞~화곡로입구R  : 1.4㎞(신월 수계 900㎜)

➁ 화곡로입구R~강서구청입구R : 3.3㎞(우장산 수계 700㎜)

➁ 가양역R~나이아가라호텔앞  : 2.5㎞(목동 수계 700㎜)

- 계약방법 : 제한경쟁입찰

- 입찰참가자격 : 전기공사업법 제4조에 따른 전기공사업 등록업체로서 외부전원방식 시공 실적이 있고 주된 사무실이 서울시 소재인 업체

- 제한경쟁사유 : 상수도관 전식방지 공사에 필요한 설비 및 기술을 보유하고 전문시공 경험이 있는 업체 입찰로 공사의 시공 품질 향상

추진일정

❍ 상수도관 전식방지 환경조사 및 설계용역 심사의뢰(본청) : ‘14. 1. 29

❍ 상수도관 전식방지 환경조사 및 설계용역 발주 : ‘14. 2. 17

❍ 상수도관 전식방지 환경조사 및 설계용역 준공 : ‘14. 4. 30

❍ 기술용역타당성심사 의뢰 및 공사 계약심사 의뢰(본청) : ‘14. 5.  1

❍ 상수도관 전식방지 공사 및 감리용역 발주 : ‘14. 5. 15

❍ 상수도관 전식방지 공사 및 감리용역 착공 : ‘14. 6.  1

❍ 상수도관 전식방지 공사완료 : ‘14. 8. 31.

행정사항

❍ 상수도관 전식방지 기술용역 타당성 심사의뢰(본청 기술심사담당관)

❍ 상수도관 전식방지 환경조사 및 설계용역 결과 추가 공사가 필요하여예산 부족 시 2015년 예산반영 공사시행.

따로붙임 : 위치도 1부.  끝.

위  치  도

(‘14년 상수도관 부식방지 사업)