문서번호	도로시설과-2772
결재일자	2016.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	전용도로팀장	도로시설과장	안전총괄관
박용화	이앙식	송상영	03/09 이택근

2016년도 자동차전용도로(토공구간) 후 포장도로 정비공사 추진 계획 보고

2016년도 자동차전용도로(토공구간)

노후 포장도로 정비공사 추진 계획 보고

2016. 3

안전총괄본부

(도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	시설관리공단
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년도 자동차전용도로(토공구간)

노후 포장도로 정비공사 추진 계획 보고

2016년도 자동차전용도로 노후포장 정비대상 구간에 대하여 현장 확인을 통한 적정성 여부 검토결과에 따라 정비계획을 수립․시행하여 자동차전용도로 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 자동차전용도로 포장 유지관리 현황

○ 노선 : 올림픽대로 등 11개 노선

○ 규모 : 연장 165.02km, 관리면적 61,163a

- 토공구간(10개 노선, 연장 101.91km, 포장면적 43,409a)

○ 포장도로 유지보수 현황(토공구간)

구 분	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년
면적(a)	2,749	3,793	2,111	635	1,513	1,056	2,284
예산(억원)	53	70	51	30	43	43	73

□ 사업개요(2016년)

○ 규    모 : 총 56개소 2,284a

노선	계	강변 북로	올림픽대로	북부 간선로	동부 간선로	경부 고속	언주로	양재 대로	서부 간선로	내부 순환로	소파 보수
개소	56	8	19	1	6	5	1	1	14	1
면적(a)	2,284	310	748	102	226	331	48	112	302	5	100

○ 공사기간 : ‘16. 3 ~ 11

○ 소요예산 : 6,182백만원

○ 시행방법 : 서울시설공단 민간대행 사업으로 시행

※ 2015년 정비 실적 : 총 55개소(2,270a)

노선	계	강변 북로	올림픽대로	동부 간선로	경부 고속	언주로	양재 대로	서부 간선로	제물포길	노들길	램프 구간
개소	55	6	21	7	2	4	3	5	1	1	5
면적(a)	2,270	205	824	323	241	214	276	163	17	3	4

□ 추진 경위

○ ‘16. 1. 15 ~ 2.29 : 11개 노선 현장조사(공단)

○ ‘16. 2. 02 : 포장 대상구간 현황 제출(공단→市)

□ 노후포장도로 정비 대상 구간 선정 검토

○ 대상구간 선정 방법

- SPI지수 및 육안조사·포트홀 발생건수 등을 고려하여 대상구간 선정

- 대상구간(총 56개소) 중 포장 파손이 심각한 7개소에 대하여 코아채취에 따른 균열깊이 판단으로 포장 정비 두께 결정

○ 검토의견

- 코아채취가 미실시된 49개소는 균열깊이를 확정할 수 없어 포장 정비 두께 산정이 불명확함.

⇨ 공사시행 전 코아채취 실시로 균열깊이 확인 후 정비 시행

- 포트홀 응급복구 구간의 항구복구를 위한 소파보수 물량 반영

⇨ 소규모 포장보수 : 100a

○ 예산배정 검토

- 포트홀 발생 방지를 위하여 우기 전 노후개량 포장공사의 조속한 사업 추진을 고려하여 예산(6,182백만원) 일괄 배정 조치

□  향후계획

○ ‘16. 3. : 예산 배정, 계약심사 및 발주

○ ‘16. 4. : 공사계약 및 착공

○ ‘16. 6. : 소파 발생 예상 구간 우선 정비 완료

○ ‘16.11. : 공사 완료

첨 부 : 1) 2016년도 자동차전용도로 노후포장 정비 대상구간 1부.

2) 위치도 및 현장사진 1부.

3) 위치도(전체) 1부.  끝.