문서번호	설비부-3846
결재일자	2016.3.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
김현숙	김영수	03/15 권오식

『시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.03

도시기반시설본부 설비부

「시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 전기공사」

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

「시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 전기공사」의 관급자재 중 CCTV와 LED조명의 설치시기 미도래로 납품기한 연장을 하기 위한 보고임.

사업개요

□ 사 업 명 : 시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 전기공사

□ 위    치 : 경기도 용인시 처인구 묵리 464번지 외 8필지

□ 공사기한 : 2017.03.01.

실정보고 내용

□ 납품기한 변경내용

구 분	계약번호	계약업체	계약금액	납품기한		비 고
				당초	변경
CCTV Pole	00145045501	주식회사 성현하이텍	1,740,000원	2016.03.29	2016.12.30
LED 조명	23143099503	주식회사 솔라이트	45,299,000원	2016.04.12	2016.12.30
	00157012304

□ 연기사유 : 물품 설치시기 미도래

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과

실정보고 내용

□ 공사 진행 상 물품 설치시기가 아직 도래하지 않아 납품기한을 연기하여       현장 내 자재관리 및 공정관리에 만전을 기하고자 하며,

□ 건설총괄부에 납품기한 연기를 의뢰하여 진행하고자 함.

붙임 : 합의서 2부.  끝.