문서번호	건축부-4158
결재일자	2016.4.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김찬유		신명승	04/01 안재혁
협 조
	재사용플라자개관추진팀장			김현주

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 재사용플라자건립공사 건설사업관리용역

2016. 3.

도시기반시설본부

(건  축  부)

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토

재사용플라자건립공사 건설사업관리용역

재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역(감독권행대행)과 관련하여 물가변동에 의한 계약금액 조정 요청서가 제출되어 아래와 같이 검토 보고함.

용역개요

용 역 명 : 재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역

용역업체 : (주)펨코엔지니어링건축사사무소 외 1개사

용역기간 : 2015. 01.22. ~ 2017. 03. 21.

용 역 비 : 2,124,500,000원

차수별 계약현황

구분	용역금액(원)	기간	비고
총차	2,124,500,000	2015.01.22 ~ 2017.03.21
1차	555,790,000	2015.01.22 ~ 2015.10.17	완료
2차	431,895,000	2015.10.18 ~ 2016.03.27	완료
3차	700,000,000	2016.03.28 ~ 2016.11.16	진행
장래	436,815,000	2016.11.17 ~ 2017.03.21

계약금액 조정 사유 및 근거

조정 사유 : 물가변동으로 인한 계약금액 조정

관련근거

- 지방계약법 제22조, 같은 법 시행령 제73조 및 같은 법 시행규칙 제72조

- 행정자치부예규 ‘기술용역계약 일반조건’ 제15조

※ 국토해양부 고시 제2015-472호(2014.05.23)에 의한 ‘2016년도 감리원 임금 공표(2015.12.28. 한국건설기술관리협회)

계약금액 조정요건 검토

조정요건 : 기간요건, 변동요건 및 절차상 요건이 모두 충족되어야 함.

- 기 간 요 건 : 계약체결일로부터 90일 경과

- 변 동 요 건 : 입찰일을 기준으로 품목조정률이 100분 3(3.0%) 이상 증감

- 절차상 요건 : 계약상대자의 조정 청구

계약체결일(기준시점) : 2015. 1.22. (입찰일 : 2015. 1.13.)

조정기준일(비교시점) : 2016.01.01.

검토결과

- 기 간 요 건 : 계약체결(기준시점)일로부터 343일 경과 ⇒ 적합

- 변 동 요 건 : 품목조정률 3.39% 증가 ⇒ 적합

- 절차상 요건 : 계약상대자(펨코엔지니어링PC-166(2016. 3.23)의 청구 ⇒ 적합

계약금액 조정 내역

계약금액(총차)(A)	2,124,500,000원
적용제외대가(B)	753,514,161원
적용대가(C)	1,370,985,839원
품목조정율	3.39%
조정금액(총액)(D=C×3.39) (천원미만 절사)	46,476,000원
변경후 계약금액(총차)(E=A+D)	2,170,976,000원

처리의견

물가변동으로 인한 계약금액조정 요청사항에 대하여 검토한 바, 적정하다고 판단되므로 이를 계약상대자에 통보

향후 조정된 금액을 반영하여 건설사업관리용역 계약변경 조치코자 함.

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증감	비고
총차	2,124,500,000	2,170,976,000	46,476,000

따로붙임 1. 재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역 물가변동으로 인한 계약금액        조정승인 요청공문(펨코엔지니어링). 1부. 끝.