문서번호	토목부-7518
결재일자	2016.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
심규진		이동훈	04/15 김영수
협조
	주무관		오열상

설계변경 검토보고(총괄10회, 7차4회)

(월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역)

2016. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계변경 검토보고(총괄10회, 7차4회)

(월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역)

『월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역』제4회 물가변동분 반영에 따른 총괄 및 7차 감리용역에 대해 설계변경하고 제3회 물가변동에 따른 6차1회 설계변경 시 과다적용된 26,100천원을 감 적용코자 검토보고 함

Ⅰ		관련근거

○ 물가변동으로 인한 감리용역 계약금액 조정요건 발생 보고(제4회)

[인프라토목-16-00760]

Ⅱ		용역개요

○ 위    치 : 마포구 상암동 ～ 영등포구 양평동

○ 규    모 : 폭 6차로, 연장 1.98km

○ 사업기간 : ‘10. 1. 5. ～ ‘20. 9.30. (7차 : ‘15. 2. 4. ～ ‘16. 5.13.)

○ 용 역 비 : 9,250,060천원 (7차 : 909,179천원)

○ 용 역 사 : ㈜포스코엔지니어링 외 1개사

Ⅲ		보고내용

○ 설계변경내용

- 2016. 1. 1. 기준 제4회 물가변동분을 반영하여 총괄 계약금액을 141,630천원 증액하고

- 6차 1회 설계변경 시 과다적용된 부분(26,100천원)에 대하여 감액 변경없이 감리 투입기한을 연장조정하여 변경계약코자 함

· 제4회 물가변동 적용 : 계약기간 감 5일 (9,670천원)

· 6차 1회 설계변경 시 과다적용된 부분 적용 : 증 14일 (26,100천원)

· 계 : 증 9일 (당초 투입기한 : ‘16. 5.13. → 변경 투입기한 : ‘16. 5.22.)

○ 용역비 변경현황                                   (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 괄	9,250,060,000	9,391,690,000	증 141,630,000
7 차	909,179,000	909,179,000	-

○ 용역기간 조정내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총 괄	2010. 1. 5. ~ 2020. 9.30.	변경없음
7 차	2015. 2. 4. ~ 2016. 5.13.	2015. 2. 4. ~ 2016. 5.22.	증9일

Ⅳ		조 치 의 견

○ 위 보고내용과 같이 총괄 및 7차에 대한 설계변경을 추진하여 건설사업관리업무에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 설계변경 내역서(총괄10회, 7차4회) 1부.  끝.