문서번호	주거환경개선과-4406
결재일자	2016.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주거환경계획팀장	주거환경개선과장
한민영		이종욱	04/21 박경서
협 조

성북구 상월곡동(삼태기마을) 주거환경관리구역 정비기반시설 기본및실시설계 용역비 예산재배정(안)

2016. 4.

주거환경개선과

성북구 상월곡동(삼태기마을) 주거환경관리구역

정비기반시설 기본및실시설계 용역비 예산재배정(안)

성북구로부터 상월곡동(삼태기 마을)주거환경관리사업 정비기반시설 기본 및 실시설계 용역비 신청이 접수되어 자치구에 예산 재배정하여 원활한 사업을 추진코자 함.(※ 재배정 금액 : 33,484천원)

사업 개요

❍ 위 치 : 성북구 상월곡동 24번지 일대 (삼태기마을)

❍ 규 모 : 35,997㎡ / 160개동 / 394세대

❍ 특 징 : 제1종/2종일반주거지역, 일반미관지구, 자연경관지구

❍ 사업내용

1) 정비사업 내역 및 규모

연번	사 업 명	세부사업	규모	단위
1	보행계단 및 급경사 구간 정비	계단 난간정비 및 미끄럼방지 포장	289	㎡
2	하수도 신설 및 가로환경 정비	하수도 신설(Φ 450mm)	130	m
		하수도 보수(Φ 450mm)	65	m
		가로환경 정비	390	㎡
3	통과도로 확보	도로개설	129	㎡
		공공공지 조성	176	㎡
		건물철거	41	㎥
4	교통안전시설 설치	교통안전시설 설치	600	㎡
5	CCTV 설치	CCTV 설치	7	개소
6	햇살어린이공원 정비사업	어린이공원 리모델링 사업	300	㎡
7	주민쉼터 조성사업	어르신 쉼터 조성	85	㎡
		화단 조성	72	㎡
8	마을홍보 및 투어사업	마을지도	3	개소
		마을안내표지판	5	개소

2) 정비사업결정도 : 붙임 참조

추진 현황

❍ `13. 10.	: 사업대상지 선정

❍ `13.12~`15.2	: 계획수립 용역

❍ `15.12.31	: 정비구역 지정 및 지형도면 고시(시고시 제2015-419호)

❍ `16. 3. 24	: 정비기반시설 설계비 예산 재배정 신청(성북구)

재배정 계획

❍ 사 업 명 : 성북구 상월곡동(삼태기마을) 주거환경관리사업 정비기반시설 기본 및 실시설계 용역

❍ 재배정처 : 성북구 마을재생기획단 도시재생디자인과

❍ 주요 교부조건

- `15년 제18차 도시계획위원회(`15.12.2) 심의조건 이행 철저

- 신설되는 도시계획시설(도로, 공공공지) 설치시 인접부지의 건축행위에 미칠수 있는 영향에 대하여 법적 검토를 거쳐 진행될 수 있도록 조치하시기 바람

- 시비 재배정 예산 조기집행 철저

❍ 재배정액 : 33,484천원

- 예산과목 : 도시재생본부 주거환경개선과, 평생 살고 싶은 마을만들기 추진, 주거지 재생사업 추진(도정), 주민참여형 주거지 재생사업(도정), 시설비(401-01) ※ 2015회계년도 명시이월 예산

향후 계획

❍ ‘16. 4. : 기본 및 실시설계용역비 예산 재배정(시→자치구)

❍ ‘16. 4. : 설계용역 업체 선정 및 계약

❍ ‘16. 8. : 설계 완료

붙임 1) 시비 재배정 교부 결정서 1부.

2) 기본 및 실시설계비(산출내역) 1부.

3) 정비사업결정도 1부.  끝.