문서번호	설비부-7603
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		유병기	05/16 권오식
협조

『강남순환도로건설(4공구)  전기공사』

교량점검등 설계 반영 보고에 대한 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05

도시기반시설본부

(설 비 부)

『강남순환도로건설(4공구) 전기공사』

교량점검등 설계반영 보고에 대한 검토

우리 본부에서 시행 중인 『강남순환 4공구 건설 전기공사』와 관련하여 1차 기아대교 교량점검등 우선시공분에 대한 실정보고 사항을 검토하고 보고드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 전기공사

○ 규    모 : 도시고속도로 4~8차로, 연장 2,481m(토목)

- 가로등 258본, 분전반 6면, 지하차도등 540등, 경관조명 1식

○ 공사기간 : ‘10.05.25 ~ ’16.05.19.(2차 : ‘15.2.24~’16.05.19.)

○ 공사금액 : 2,114,166,780원(2차-1,266,723천원)

○ 시 공 사 : ㈜세흥건설외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜서영엔지니어링

관련근거

○ 서영강남 16-274호(2016.05.13.) 점검등(1차 기아대교)  실정보고

보고 내용

○ 기아대교 교량내부 점검등 내역 반영

- 1차 공사 준공시 예산부족으로 관급자재인 교량점검등을 구매하지 못하여 시공사에서 우선시공함.

- 우선시공분에 대하여 2차 내역에 반영하여 지급필요

- 교량점검등은 금년도 관급자재 단가를 적용하여 사급처리

공사비 변경 현황(증5,423천원)

○ 주요변경사항

(단위:천원)

구 분	주요 공종	당 초	변 경	증감	비고
교량점검등	기아대교 교량점검등 123등	-	5,423	5,423	VAT별도
계			5,423	5,423

감리 검토의견

○ 1차분에 반영되지 못한 교량점검등 123개에 대하여 조달단가를 적용한 금액이 적정한 것으로 판단되며

○ 자재비 반영은 추후 설계변경시 정산하고자 함.

조치의견

○ 위 실정보고 사항에 대하여 검토한 결과 감리단 검토 의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며 설계변경시 반영하도록 통보하고자 함.

따로붙임 :  감리단 실정보고 공문 1부.  끝.