문서번호	시설과-2592
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
김영균	임록화	진병규	05/19 이춘희
협 조
	주무관		이전호

관급자재 납품기한 연기보고

(현장근로자 근로환경 개선공사)

2016. 5.

동부공원녹지사업소

(시     설     과)

관급자재 납품기한 연기보고

(현장근로자 근로환경 개선공사)

『보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사』와 관련하여 관급자재(철근 및 레미콘)의 납품기한 연기에 대한 보고임

Ⅰ		공사개요

❍ 건축규모 : 지하0층, 지상 2층, 연면적 468.50㎡

❍ 시 공 자 : ㈜푸른종원건설(대표 : 차상민)

❍ 공사기간 : 2016. 03. 07 ~ 10. 06 (7개월)

❍ 감 리 자 : ㈜유현준건축사사무소 대표 허진성

❍ 계약금액 : 653,002천원(건축)

Ⅱ		관급자재 구매개요

구 분	납품요구번호	수 량	계약금액	납품회사	납품기한
계	-	-	84,190,200	-	-
철 근	12-16-1-19032-00	75.777톤	41,004,820	환영철강공업	‘16.05.30
레미콘	12-16-1-20253-00	653.0㎥	43,185,380	서울경인레미콘	‘16.06.30

Ⅲ		납품기한 연기검토

❍ 연기사유 : 대형 소나무 수목 존치를 위한 건물 위치 조정 검토

❍ 납품기한 연기

- 철    근 : 2016. 05. 30 → 2016. 07. 30

- 레 미 콘 : 2016. 06. 30 → 2016. 09. 30

❍ 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미 부과

Ⅳ		조치의견

❍ 관급자재 납품기한 연기 조치코자 합니다.