서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성 기본구상용역 계약변경 의뢰

1. 한양도성도감-4941(2016. 5. 24.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 진행 중인 ‘남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성 기본구상용역’ 과 관련하여 아래와 같이 변경사유가 발생하여 계약변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 과업 개요

○ 용 역 명: 남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성 기본구상용역

○ 계약금액: 금18,680,000원(금일천팔백육십팔만 원)

○ 계약업체: 디자인밴드요앞 건축사사무소(대표 신현보)

나. 계약변경 내용

○ 변경계약 사유: 남산 TF팀 회의 개최

○ 변경내용

구분	변 경 전	변 경 후	비고
용역기간	2016. 4. 14 . ~ 2016. 5. 28.	2016. 4. 14. ~ 2016. 6. 17.	증) 20일
계약금액	금18,680,000원	금18,680,000원	변동없음

붙임  1. 남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성 기본구상용역 변경 계획 1부.

2. 합의각서 1부(별도 송부).  끝.

	한양도성도감과장
주무관	김동욱		도성관리팀장	이희향		한양도성도감과장	05/24 심말숙
협조자
시행	한양도성도감-4967	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 별관1동 5층 (서소문동)	/
전화	02-2133-2674	/전송	02-2133-1063	/	donguk@seoul.go.kr	/	부분공개(7)