투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	원효대교기전설비 이설공사(공사기간 연장)

우리 사업소에서 시행 중인 “원효대교 기전설비 이설공사” 공사기간 연장을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 원효대교 기전설비 이설공사

나. 도 급 자 :*****************

다. 공사기간 변경 내용

공사 기간		변경 사유
당 초	변 경
2016.3.15.～6. 2	2016.3.15.～ 9.30	선행공정인 토목공사 지연에 따른 절대공기 부족으로 연장

라. 공사금액 :*************

마. 귀책사유 : 서울특별시(서부도로사업소)

바. 연체료 부과여부 : 미부과

사. 예산과목 : 교량관리, 한강교량관리, 원효대교보수공사, 시설비

붙임  보고서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),관리단속과장
주무관	윤석주		기전과장	05/31 양영민
협조자
시행	기전과-5830	(		)	접수		(		)
우	03918	서울 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 기전과	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8391	/전송	20-300-8410	/	younsj@seoul.go.kr	/	대시민공개