문서번호	설비부-8995
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
윤대영		임현근	06/07 권오식
협조

『양천주민편익시설 증축 기계설비공사』

준공기한 연기검토 보고

2016. 6.

도시기반시설본부

설비부

『양천주민편익시설 증축 기계설비공사』

준공기한 연기검토 보고

우리본부에서 추진하고 있는『양천주민편익시설 증축 기계설비공사』와 관련하여 건설사업단으로부터 준공기한 연기 요청이 있어  검토후 아래와 같이 보고 드림.

1		공사개요

□  공 사 명 : 양천주민편익시설  증축 기계 설비공사

□  위    치 : 양천구 목동 900번지

□  규    모 : 지하3층 / 지상 3층, 연면적 5,841㎡

기계공사 1식, 소방설비공사 1식

□  도 급 액 : 금2,336,941,000원(3차: 1,529,455,700원)

□  도 급 자 : 보라이앤씨(주), 기건공영(주)

□  공사감독 : ㈜엄＆이 종합건축사사무소

2		검토근거

□ ㈜엄＆이종합건축사사무소 양천2016-101호(2016.06.03.)호

- 준공기한 연기 요청(기계) 검토보고

3		준공기한 연기검토

□  연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
공사 기간	’14.12.15 ~ ’16.06.14	’14.12.15 ~ ’16.07.21	37일 연기
	’16.01.05 ~ ’16.06.14	’16.01.05 ~ ’16.07.21
공사 금액	총차 금2,336,941,000원	총차 금2,336,941,000원	변경 없음
	3차 금1,529,455,700원	3차 금1,529,455,700원

□  연기사유 : 선행공정인 건축공사의 연기(‘16.07.21. 준공예정)에

따른 후속 공정인 기계설비공사의 준공기한 연기

□  지체상금 부과여부 : 미부과

□  건설사업단검토의견: 건축공사 연기에 따른 기계설비 공사기간 연           장이 적정 할 것으로 사료됨.

□ 연기사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

4		보고자 검토의견

□  건설관리사업단의 준공기한 연기 의견이 타당한 것으로 판단되어 건축공사 준공 기한(‘16.07.21)까지 준공기한을 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

첨  부 : 1) 공사기간 조정 승인 요청공문  1부

2) 시공사 공사기간 연기요청 공문 및 합의서 각 1부. 끝.