서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기간 연기(문화예술공방 기본계획 수립)의뢰

1. 재무과-62100(2016.12.15.)호와 관련 입니다

2. 위와 관련하여 시행중인『창동 복합문화공연시설 조성관련 문화예술공방 기본계획수립』용역에 대하여 아래와 같이 계약기간을 연장코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다

□ 계약변경 내용

가. 용 역 명 : 창동 복합문화공연시설 조성관련 문화예술공방 기본계획수립

나. 변경내용 : 계약금액 변경없는 용역기간 연장

다. 용역기간 ┍ 당 초 : 2015.12.11. ~ 2016.06.12

┕ 변 경 : 2015.12.11. ~ 2016.12.12

라. 용역금액 : 변경없음

마. 용역업체 : ㈜아키앤종합건축사사무소

따로붙임 : 1)검토보고서 1부.

2)합의각서 1부.  끝.

	동북4구사업단장
주무관	김성권		선도사업관리팀장	장양규		동북4구사업추진반장	06/10 정거택
협조자
시행	동북4구사업단-5375	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울시청 신청사 9층	/
전화	02-2133-8443	/전송	02-3708-2599	/	sssggk@seoul.go.kr	/	대시민공개