투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(총괄4회,4차1회) 계약 의뢰

1. 우리 본부에서 추진중인 『한강공원 나들목 증설공사(신청담)』와 관련 설계변경(총괄4회, 4차1회)에 대하여 아래와 같이 계약의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(신청담)

나. 계약기간 : 2013. 04. 25 ∼ 2016. 12. 31(총괄)

2016. 01. 18 ∼ 2016. 12. 31(4차)

다. 계약금액 : 8,860,690천원(총괄)

라. 도 급 자 : 한양산업개발주식회사  대표 이왕섭

마. 설계변경 사유 : 수량정산 및 실정보고사항 반영(주요 설계변경 요약서 별첨)

- 총괄 : 물가변동 조정금액 반영, 고유동레미콘 사급전환, 품질관리 활동비 반영

- 4차  : 헬리컬말뚝 수량정산 반영, 구체방수재 수량정산, 건설기계대여대금         지급보증서 발급수수료 반영 등

바. 설계변경 금액                                           (단위:천원)

구 분	총 괄(4회)			4차(1회)
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
도급비	8,860,690	9,149,500	증 288,810	4,500,000	4,500,000

사. 예산과목

- 한강공원이용 및 생태환경 개선, 한강의 자연성회복 및 시민편의 개선, 한강 접근체계 개선,

한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비(100-401-01)

첨부 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경사유서(총괄4회, 4차1회) 1부.

3. 설계변경내역서(총괄4회) 1부.

4. 설계변경내역서(4차1회) 1부.

5. 실정보고서 6부.  끝.

	치수과장
주무관	방호익		치수과장	06/15 신용철
협조자	주무관	박정태
시행	치수과-1928	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	대시민공개