문서번호	축산물부-8381
결재일자	2016.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	인수공통질병팀장	축산물부장
양윤모	김영섭	06/22 이주형

준공보고서(생물안전3등급 연구시설)

보건환경연구원

(축산물부)

□ 공사명 : 서울시보건환경연구원 BL3 검증관련 보완공사

□ 위  치 : 경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동)

□ 목  적

서울시보건환경연구원(축산물부)에서 운영하고 있는 생물안전 3등급(BL3)

연구시설 인증획득을 위하여 질병관리본부 시설기준에 적합한 보완공사를

시행하고자 함

□ 계약사항

1. 계약금액 : 48,906,000(VAT 포함)

2. 계약일자 : 2016. 5.23.

3. 착공일자 : 2016. 5.23.

4. 준공기한 : 2016. 6.20.

5. 준공일자 : 2016. 6.20.

6. 준공금액 : 42,210,000(VAT 포함)

□ 공사 내용 (당초)

1. 센서 검교정

2. PASSBOX 보완공사

3. 피난유도등 설치

4. 배관공사

5. 덕트 공사

6. 헤파필터박스 마감공사

7. 배기휀 모터 교체공사

8. 차수벽 설치

9. 멸균기 수리

10. 자동제어 부품 교체

□ 공사 변경 사항

- 공사 내용 중 폐수탱크의 차수벽 미설치

1. 폐수탱크 사용현황 : 미생물부, 축산물부 BL3 실험실 운영시 동일

폐수탱크 사용

2. 변경사유

축산물부의 경우 신규허가로서 차수벽을 설치하여야 하나 해당 폐수탱크가

2015년 미생물부의 BL3 재검증시 인정된 차수벽 설치 미적용 폐수탱크와

동일함으로 이에 대한 설치여부를 질병관리본부에 문의한 결과 설치하지

않아도 된다는 회신을 받음

3. 계약금 및 준공금 변경사항

가. 차수벽 미설치로 인한 공사비(재료비, 경비) 감액

- 당초 48,906,000(VAT 포함) → 42,210,000(VAT 포함)

※ 붙임 “준공내역서” 등 참조

□ 공사 하자담보 기간 : 준공검사일로부터 1년

붙  임  1. 준공내역서 1부.

2. 공사변경 내역서 1부.

3. 준공사진 1부. 끝.