문서번호	도시철도토목부-7893
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
장대성		김정수	06/23 김진팔
협조

『하남선(5호선 연장) 1공구 건설공사』

사후환경영향조사용역 설계변경 검토보고(총괄1회, 1차 1회)

2016. 6.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「하남선(5호선 연장) 1공구 건설공사」

사후환경영향조사용역 설계변경 검토보고(총괄1회, 1차 1회)

하남선(5호선연장) 1공구 건설공사 사후환경영향조사 용역 과업수행 중 계약상대자로부터 설계변경 요청 건이 있어 검토내용과 같이 시행코자 합니다.

□ 관련근거

○ 환경영향평가법 제33조 (환경보전방안검토)

○ 환경영향평가법 제36조 (사후환경영향조사)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 하남선(5호선연장) 1공구 사후환경영향조사 용역

○ 계약금액 : 총괄 443,200천원(1차 97,685천원)

○ 계 약 자 : (주)동명기술공단종합건축사사무소 대표이사 신완수 외 1개사

○ 용역기간 : (전체) 2015.05.12 ~ 2022.04.11

(1차)  2015.05.12 ~ 2016.06.30

○ 계약 및 진행현황

(단위 : 백만원)

구 분	하남선 1공구		비 고
	차수별	용역기간
최초 도급비	443	‘15.05.12 ~ ‘22.04.11	변경사항 없음
현 도급비	443	‘15.05.12 ~ ‘22.04.11
소 계	443	-
1차(진행중)	98	‘15.05.12 ~ ‘16.06.30	진행중
장 래	345

□ 검토내용

○ 변경 사유

- 상기 용역은 현재 진행중인 하남선(5호선 연장) 1공구 건설공사로 인한 공사장 주변 환경피해를 방지하기 위하여 “환경영향평가법”에 의해 시행한 “환경영향평가”상 사후환경영향조사 계획에 의하여 시행하는 용역으로써,

- 과업 시행중 공사시기 미도래로 인해 하수종말처리장 미연계 및 저감시설 등이 미설치되어 오수처리수, 폐수처리수, 토양 등에 대한 측정이 불가함에 따라, 1차분에 반영된 해당 항목에 대하여 조정이 필요

○ 설계변경 추진 계획

(단위 : 천원)

구 분	총 괄			1차
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
계약금액	443,200	438,437	감)4,763	97,685	92,922	감)4,763
계약기간	‘15.5.12~ ‘22.4.11	‘15.5.12~ ‘22.4.11	변경없음	‘15.5.12~ ‘16.6.30	‘15.5.12~ ‘16.6.30	변경없음

□ 보고자 의견

○ 본 설계변경은 하남선 1공구 건설공사 해당공종에 대한 공사시기 미도래로 인해 사후환경영향조사 항목 중 일부 측정이 불가한 항목에 대해 감액하는 것으로서, 상기 검토내용과 같이 계약금액을 변경하는 것이 타당한 것으로 판단되어 설계변경 시행하고자 합니다.

□ 향후 조치계획

○ 계약부서(재무과)에 계약변경 의뢰하여, 하남선(5호선연장)1공구 건설사업사후환경영향조사 용역 추진에 만전을 기하고져 하며

○ 상기 용역 업무의 연속성 및 원활한 추진을 위해 2차 용역계약 추진코자 합니다.

붙임 : 1. 용역사 요청 공문 1부.

2. 변경 설계서(총괄, 1차) 각1부.

3. 합의각서 1부.  끝.