문서번호	토목부-13195
결재일자	2016.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
심규진		이동훈	06/28 代이동훈
협조
	주무관		오열상

북단접속교 MP3 교량받침 변경 검토보고

《 월드컵대교 건설공사 》

2016. 6.

도시기반시설본부

토 목 부

북단접속교 MP3 교량받침 변경 검토보고

(월드컵대교 건설공사)

북단접속교 MP3에 부반력이 발생하여 부반력 제어가 가능한 부반력 교량받침으로 변경코자 검토보고 드림.

공사개요

❍ 공사규모 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1,980m

❍ 공사기간 : 2010. 3.22. ~ 2020. 8.31.

❍ 도 급 액 : 177,008백만원

❍ 시 공 사 : 삼성물산㈜ 외 2개사

❍ 감 리 단 : ㈜포스코엔지니어링 외 1개사

검토배경

❍ ‘13. 7월 방화대교 시공 중 전도사고 후 당해 공사의 부반력 발생여부에 대해 검토한 결과, 부반력 발생지점에 부반력 받침을 적용코자하는 사항임.

- 토목부-24468(2015.11.19.)호 : 공법변경 불필요 → 부반력 받침 등 적정대안 수립

건설사업관리단 보고내용

❍ 월드컵대교 북단접속교(강북방향) 부반력 발생에 대한 월설계사 검토 결과 부반력 제어를 위해 MP3 교량 받침을 부반력 받침으로 변경하는 것이 타당하다고 판단됨.

❍ 반력 검토

- 지점반력 집계 및 부반력 발생여부 검토                     (단위 : KN)

구분	절점	지점반력		고정하중+(활하중x2)			비 고
		최대	최소	고정하중	활하중x2	검토결과
MP3	SR	1647.2	118.6	561.9	-650.8	-88.9	부반력 발생
	SL	1647.2	118.6	561.9	-650.8	-88.9	〃

❍ 위치도 및 평면도(MP3)

북단접속교 MP3

부반력 받침으로 변경

2500kN 양방향

2500kN 일방향(교축)

❍ 공사비 검토

(단위:천원)
구 분		규 격	단위	당 초		변 경		증 · 감		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
도급공사비	2500KN (일방향,교축)	일반받침	개소	1	4,425	-	-		-4,425
		부반력받침	개소	-	-	1	5,500		5,500
	2500KN (양방향)	일반받침	개소	1	2,120	-	-		-2,120
		부반력받침	개소	-	-	1	2,955		2,955
공 사 비 계					6,545		8,455		1,910
부 가 가 치 세					655		845		190
합 계					7,200		9,300		2,100

※ 단가적용 : 협의율(82.004%)

조치계획

❍ 위 보고내용과 같이「북단접속교 MP3 교량받침 변경 실정보고」에 대해 검토한 바 적정하여 승인하고 향후 설계변경 시 반영코자 함.

붙  임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.