문서번호	기전과-8181
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	강서도로사업소장
한영호		박재경	06/29 신현태
협조
	주무관		하호영

『오목지하차도 출입구 변경에 따른』 전기설비개량 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  6.

강서도로사업소

(기 전 과)

오목지하차도 출입구 변경에 따른

전기설비개량 추진계획

오목지하차도 관리실 출입구 변경공사와 병행하여 내구년한이

경과되고 노후된 전기설비 개량사업의 시행계획을 아래와 같이 수립

하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

ㅇ 시설보수과-4794(2015.6.24.) : 오목지하차도 관리실 출입구 변경 추진계획

ㅇ 도로시설과-1608(2016.2. 5.) : 2016년 도로기전시설물 개선사업 예산배정

ㅇ 도로시설과-7380(2016.6. 22.) : 예산 재배정(오목지하차도 관리실 구조개선 공사)

□ 시설물 개요

ㅇ 시설물명 : 오목지하차도(양천구 목1동 406-5)

ㅇ 시설규모 : 폭 20m, 길이 590m(터널 320m, 옹벽 270m)

ㅇ 구조물 준공년월일 : 1996. 8. 1

ㅇ 관리실 출입구 및 전기실 규격 : 구조물 3.0×7.6×5.2m(폭×길이×높이)

ㅇ 전기설비 : 수배전반 4면, 배수펌프 3대, 조명등 480등

□ 구조물 변경공사 추진

ㅇ 지하차도 관리실 출입구 구조물이 보도에 위치하여 주변 도시환경을 저해하고,

인근주민 민원해소를 위해 추진되는 공사로써, 출입구 구조물의 최소화 및 지상

전기실을 지하1층으로 이전 설치하는 공사추진

ㅇ 설계완료 및 공사발주 : 2016. 6. 28

ㅇ 시행부서 : 강서도로사업소 시설보수과

□ 사업개요

ㅇ 내구년한이 경과되고 노후된 전기설비의 개량 추진

※ 「물품관리법」제16조의2, 조달청고시 제2011-18호 배전반 내용연수 10년

ㅇ 개량대상

- 수배전반 제작구매 설치 : 4면

- 인입 케이블 및 전선관로 설치공사 : 1식

ㅇ 소요예산 : 117,000천원

ㅇ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리,

지하차도 노후배수시설 개량사업, 시설비

ㅇ 예산편성 현황                                      (단위 : 천원)

사 업 명	예산배정	추진현황	비 고
계	322,000
수배전반 제작구매 설치	65,000	설계완료	조달의뢰(기전과)
인입케이블 설치공사	52,000	설계중	공개입찰(기전과)
구조물 변경공사	200,000	발주완료 (2016.6.28.)	시설보수과 시행
설계 용역비	5,000	준공완료 (2016.6.28.)	시설보수과 시행

□ 추진계획

ㅇ 수배전반 제작구매 발주 : 2016. 6. 29

ㅇ 인입케이블 설치공사 설계 및 발주 : 2016. 7. 20

ㅇ 물품제작 및 공사준공 : 2016. 11. 30

ㅇ 물품검수 및 공사준공 : 2016. 5. 31

붙임 : 1. 출입구 변경 추진계획 방침서 1부.

2. 예산(재)배정 통보서 2부. 끝.