문서번호	동남권공공개발추진단-411
결재일자	2016.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조성지원팀장	동남권계획반장	동남권공공개발추진단장
김정아	오장환	강성욱	01/14 최경주

코엑스~잠실운동장 일대 지구단위계획 재정비 등에 따른

전략환경영향평가 용역 준공기한 연기 보고

2016. 1.

도 시 재 생 본 부

(동남권공공개발추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

코엑스~잠실운동장 일대 지구단위계획 재정비 등에 따른

전략환경영향평가 용역 준공기한 연기 보고

코엑스~잠실운동장 일대 지구단위계획 재정비 등과 연계하여 전략환경영향평가 용역 준공기한을 연기하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 코엑스~잠실운동장 일대 지구단위계획 재정비 등에 따른 전략환경영향평가

○ 용역기간 : `15. 3.31.~`16.1.30

○ 용역기관 : (주)동해종합기술공사

○ 용 역 비 : 87,961천원

○ 과업내용

- 전략환경영향평가 실시

․개발기본계획의 적정성, 입지의 타당성 검토, 환경영향측정·분석 등

- 관련기관 협의 및 주민의견 수렴 등

□ 보고내용

○ 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 함

가. 준공기한

- 당초 : 2016. 1.30.

- 변경 : 2016. 6.30.

나. 지체상금 부과여부 : 미부과

다. 연기사유

- 코엑스~잠실운동장 일대 지구단위계획 재정비 등과 연계하여 개발기본계획에 대한 관련기관 협의 및 검토의견 반영 등 필요한 시간을 고려할 때 절대기간이 부족하여 준공기한 연기 필요

□ 향후일정

○ `16. 2. : 전략환경영향평가 초안 작성 및 주민의견 공람 등

○ `16. 3. : 환경영향평가서 본안 작성

○ `16. 4. : 관련기관 협의 등

○ `16. 6. : 협의내용 통보(환경부)

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 예정 공정표 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.