문서번호	토목부-13580
결재일자	2016.7.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		진재섭	07/01 김영수
협조

안전시설(PE 충격흡수시설 등)보완 검토보고

≪구리암사대교 건설공사≫

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.7.

도시기반시설본부

(토 목 부)

안전시설(PE 충격흡수시설 등)보완 검토보고

’14.11.20. 개통하여 공용 중인 구리암사대교에 대해 강동경찰서 등으로 부터 교통사고 예방 및 시민안전을 위해 시설보완 요청이 있어 검토 보고드림.

※ 암사(감리)2016 - 119호(’16.6.30.) : 실정보고(안전시설 보완 설치)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 규    모 : 교량건설 폭 4∼6차로, 연장 1.13㎞

○ 계 약 액 : 196,703백만원(16차 3,163백만원)

○ 공사기간 : ’06.4.5.∼ ’16.8.31.(16차 ’15.11.2.∼’16.8.31.)

○ 시공사 및 감리단 : 현대건설㈜ / ㈜도화엔지니어링외 1개사

□ 감리단 보고내용

○ 관련근거

- 2016.03.24. : 홍수기 전 하천점검 지적사항 통보(구리시 → 도기본)

‣ 구리한강시민공원 진입로 횡단 하수관 앞 배수로 덮개 설치(스틸그레이팅)

- 2016.06.09. : 교통안전시설 변경 등 시설 보완 요청(강동경찰서→도기본)

‣ 아천IC, Ramp-C 분기점 교통안전지대 축소 등 안전시설(PE 충격흡수시설, 노면표시 등) 보완 설치

- 2016.01. ∼ 06. : 도로반사경 설치 등 민원 신고(응답소)

‣ 올림픽도로 및 강변북로 합류지점 도로반사경 설치

‣ 암사동 서원마을 진입도로 하부 배수로 덮개 설치

○ 시설보완 내용

구 분	규 격	단위	수량	비 고
PE 충격흡수시설	900×600×900	개소	3	강동경찰서 요청
차선규제봉	250×80×750	개	15
차선제거		m	469
차선도색 및 노면표시	융착식	㎡	87
스틸그레이팅	700×995×50 500×995×50	개	2 3	하천점검 지적 및 민원
도로 반사경	Φ1000mm	개	3	민원

○ 소요 공사비

(단위 : 천원)

공 종	규 격	공 사 비			비고
		당 초	변 경	증 · 감
공통공사	차선제거	-	2,452	증) 2,452
부대공	차선도색(융착식)	-	2,388	증) 2,388
	차선규제봉	-	428	증) 428
	PE충격흡수시설	-	1,264	증) 1,264
	스틸그레이팅	-	374	증) 374
	도로 반사경	-	944	증) 944
소계		-	7,850	증) 7,850
제경비,부가세		-	1,150	증) 1,150
도급비		-	9,000	증) 9,000

※ 적용단가 : 수량 증·감 부분 기 계약단가,  신규단가 협의율 적용(85.3%)

○ 감리단 검토의견

- 공용 중인 구리암사대교 시설보완 요구(강동경찰서) 등 교통안전사고 예방 및 민원신고 사항에 대한 시설 보완 건으로 설계변경시 반영하는 것이 타당함.

□ 조치의견

○ 상기 감리단 검토내용과 같이 ‘안전시설(PE 충격흡수시설 등)보완’ 설치에 따른 실정보고건에 대해 승인하고 추후 설계변경시 반영하되 실시공 수량에 따라 정산에 철저를 기하도록 조치코자 함.

- 안전시설(PE 충격흡수시설 등)보완 : 증) 9백만원

붙  임 : 감리단 실정보고 및 검토의견서 1 부.  끝.