문서번호	토목부-14002
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	07/07 김영수
협조
	주무관		장종환

건설폐기물처리용역 설계변경(5차 1회)

【강남순환도시고속도로 8공구 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

도시기반시설본부

토 목 부

건설폐기물처리용역 설계변경(5차 1회)

【강남순환도시고속도로 8공구 건설공사】

「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제15조제1항 및 시행령 제11조」에 의거 분리 발주하여 시행중인 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 건설폐기물 처리용역에 대한 설계변경 사유가 발생하여 검토 보고 드림

※ 관련근거 : 동기공 2016-1787호(2016.6.30.)

용역 개요

❍ 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사 건설폐기물처리용역

❍ 용역규모 : 폐아스콘 85,957톤, 폐콘크리트 32,468톤

❍ 용역기간 : `04.04.20.~`18.07.31.(5차 `16.01.01.~`16.12.31.)

❍ 용역금액 : 금1,721,781천원 (5차: 금249,273천원)

❍ 계 약 자 : ㈜동보이앤시  대표 김지환

폐기물 처리량 및 용역비 현황

구 분	예산(천원)	수 량(톤)			비 고
		폐아스콘	폐콘크리트	계
총 괄	1,721,781	85,957	32,468	118,425
1차 (기 준공)	129,000	7,700	2,000	9,700
2차 (기 준공)	100,000	2,516	4,500	7,016
3차 (기 준공)	90,000	3,851	2,194	6,045
4차 (기 준공)	187,065	6,170	6,577	12,747
5차 (금 회)	249,273	9,900	7,083	16,983
장 래	966,443	55,820	10,114	65,934

설계변경 내용

❍ 물량 변경 현황

(단위: 톤)

구 분		폐아스콘	폐콘크리트	비 고
총괄	당 초	85,957	32,468
	변 경	85,957	32,468
	증･감	변경없음	변경없음
5차 (1회)	당 초	9,900	7,083
	변 경	8,797	15,000
	증･감	감) 1,103	증) 7,917

❍ 용역비 변경 현황

구 분		용역비	착공일	준공예정일	비 고
총괄	당 초	1,721,781,000	2004. 04. 20.	2018. 07. 31.
	변 경	1,721,781,000	2004. 04. 20.	2018. 07. 31.
	증･감	변경없음		변경없음
5차 (1회)	당 초	249,273,000	2016. 01. 01.	2016. 12. 31.
	변 경	349,273,000	2016. 01. 01.	2016. 12. 31.
	증･감	증) 100,000,000		변경없음

❍ 설계변경 사유

- 공사 추진에 따른 현장여건 반영한 건설폐기물 수량 증감

조치계획

❍ 증액되는 용역비는 강남순환 8공구 이설비 예산을 활용하여 설계변경 시행하고자 합니다.

【붙임】 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.